문서번호	기전과-15926
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		11/30
		차경호
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중

교통안전시설물 설치공사(신호)」

2023. 11. 30.

동부도로사업소

(기전과)

기전과-13563(2023.10.17)호,기전과-15925(2023.11.30)호

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 승인 통보

ㅇ 동부도로사업소 기전과-13563호(2022.10.17.)

□ 원인자부담공사 변경승인 요청 1차

ㅇ *************************************

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 개포1동주공아파트 주택재건축정비사업 중 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 개포동래미안포레스트126동앞 교차로 외 12개소

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
***	********* ***********	***** *****	********	********

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************

□ 변경사유 : 토목공사 지연에 따른 공기 연장 필요

Ⅳ		검토 의견

□ 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.  끝.