문서번호	계획설계과-10477
결재일자	2023. 11. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
민경석		백광인	11/29
			송헌영
협조
	주무관		김다은

- 강북·광암 GB관리계획 변경 및 개발행위허가 용역 -

준공기한 연기 및 사고이월 검토 보고

2023. 11. 28. (화)

급  수  부

(계획설계과)

- 강북·광암 GB관리계획 변경 및 개발행위허가 용역 -

준공기한 연기 및 사고이월 검토 보고

급수부장 :송헌영☎3146-1401 계획설계과장 : 백광인☎1410 담당 :민경석☎1414

'강북·광암 GB관리계획 변경 및 개발행위허가 용역'의 준공기한
연기 및 '23년도 예산 사고이월에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		사업개요

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 강북․광암정수장 GB관리계획 변경 및 개발행위허가 용역

ㅇ 과업내용 : 개발제한구역 관리계획 변경, 개발행위허가

-‘강북·광암 정수장 증설사업’추진에 수반되는 개발제한구역 관련 인허가

ㅇ 용역기간 : 착수일로부터 2024.12.31.까지 (1차분 ’23.12.31.까지)

ㅇ 용역금액 : 금181,728천원 (1차분 85,545천원)

ㅇ 용역업체 : (주)에이스디이씨

□ 추진 경위

ㅇ 강북․광암정수장 GB관리계획 변경 및 개발행위허가 용역

- '23.09.12.   용역 계약 (9/19 착수)

- '23.10~11   자료 조사 및 기존 GB관리계획 검토

ㅇ 강북정수장 증설사업

- '22.03. ~ '23.09.  타당성조사 및 기본계획수립용역 시행

- '23.9. ~          일괄입찰 발주 진행 중 ('24.1. 조달청 발주, '24.7. 낙찰자 선정)

ㅇ 광암정수장 고도확충 및 재정비 사업

- '22.03. ~ '23.09.  타당성조사 및 기본계획수립용역 시행

- '23.11. ~ '24.12.  기본 및 실시설계 용역 시행

Ⅱ		준공기한 연기 검토

□ 준공기한 연기 사유

********************************************

**********************************************************.

□ 준공기한 연기

ㅇ 준공기한 연기

과업기간	당초	변경	비고
전 체	2023. 9. 19. ~ 2024. 12. 31.	좌동	변경 없음.
1차수	2023. 9. 19. ~ 2023. 12. 31.	2023. 9. 19. ~ 2024. 7. 31.	7개월 연장

ㅇ 귀책사유 : 상수도사업본부

ㅇ 지체상금 부과 여부 : 미부과

Ⅲ		사고이월 검토

□ 예산 집행현황('23년)

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 안정적인 아리수 생산기반 구축, 정수장 순환정비, 시설비및부대비, 시설비, 정수장 순환정비 용역(지반조사, 측량 용역 등)

***********************************

*******

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************

*****************************************************************

******

*****************************

Ⅳ		조치계획

□ 용역기한 연장 : 본부 재무회계과에 준공기한 변경계약 요청.

□ 사고이월 : 기획예산과에 사고이월 대상사업 제출.  끝.