설계변경 심의 의견서

(장기사용 송배수관 전식방지공사(송파구간)-1차)

1. 공사명: 장기사용 송배수관 전식방지공사(송파구간)

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
업무 담당	지방공업주사보 전고운
제출 년월일	2023. 11. 30.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시: 2023. 11. 30.(목) 13:30

- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 다음과    같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

성기옥

11/30

타당함

성기옥

위    원

시설관리팀장

김주경

김주경

타당함

위    원

안전관리팀장

강희창

강희창

타당함

위    원

급수관리팀장

김종섭

김종섭

타당함

위    원

주무관

이덕규

이덕규

타당함

위    원

주무관

송정호

송정호

타당함

담    당

주무관

전고운

전고운

-

설계변경 사유서(1차)

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 장기사용 송배수관 전식방지공사(송파구간)

ㅇ 공사규모: 외부전원법 3개소

ㅇ 공사기간: 2023. 9. 4.~ 2025. 1. 3.

ㅇ 도 급 비

***************************************

***********************************

ㅇ 도 급 자: *****************

□ 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 금액	***********	***********	***********

□ 설계변경 세부내용 및 사유

ㅇ 물량 변경: 1bed 및 2bed AC 인입지점 변경에 따른 물량 감소

ㅇ 세부변경내용

구 분	규 격	단위	****			****
			***	***	***	***	***	***
Cable	F-CV 10㎟ x 2C	m	***	**	***	***	**	****
전선관	ELP 30㎜	m	***	**	***	***	**	****
보도용블록 인력철거	차도인접, 주택가 보도 등	㎡	***	****	*****	***	****	******
보도용블록 재설치	차도인접, 주택가 보도 등	㎡	***	****	*****	***	****	******
인력 터파기	인력	㎥	***	*****	******	*****	*****	******
잔토처리	인력	㎥	***	*****	******	*****	*****	******
인력되메우기	인력	㎥	***	*****	******	*****	*****	******
기계다짐(양호)	램머	㎥	***	*****	******	*****	*****	******

ㅇ 설계 변경 의견

- 실제 계약물량 감소 사항을 반영하여 설계변경 시행이 타당함.

붙임  1. 설계변경 내역서(1차) 1부.

2. 합의서 1부.  끝.