아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	조달청장(공사원가기준과장)
(경유)
제목	물가변동(7회)으로 인한 계약금액 조정 사전 검토의뢰[진접선(4호선 연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사]

우리 본부에서 시행하고 있는『진접선(4호선 연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사』 관련 물가변동(7회)으로 인한 총사업비를 조정하고자 붙임과 같이 사전 검토를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 진접선(4호선 연장) 차량기지 2공구(차량기지) 건설공사

나. 공사기간 : 2018.12.31. ~ 2027.06.30.

다. 계약금액 : 134,488,841,000원

라. 물가변동 적용내용(7회)

1) 계약금액          : 134,488,841,000원

2) 비적용 대상금액   :  48,251,350,652원

3) 물가변동 적용대가 :  86,237,490,348원

4) 지수 조정율   : 4.03%

5) 물가변동 경과기간 : 2022.09.01. ~ 2023.05.01.

6) 물가변동 증액금액   :  3,475,370,000원

7) 선금급 공제액       :   363,328,000원

8) 실 조정금액         : 3,112,042,000원

붙 임  물가변동(7회) 관련 자료 1부.(별도송부).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김민수		토목2과장	박형복		도시철도토목부장	11/30
윤병헌
협조자	주무관	배상현
시행	도시철도토목부-14462	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-6438-2623	/전송	02-6438-2649	/	kimminsu87@seoul.go.kr	/	부분공개(5)