아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	[명시이월] 응봉공원 화장실 리모델링 전기 공사 계약기간 연장 요청

1. 시설과-7514(2023. 11. 29.)와 관련입니다

2. 「응봉공원 화장실 리모델링 전기 공사」와 관련하여 아래와 같이 계약기간 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명: 응봉공원 화장실 리모델링 전기 공사

나. 요청내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
공사기간	2023. 9. 8.~2023. 12. 29.	2023. 9. 8.~2024. 3. 27.
공사금액[원]	**********	**********	변동없음

다. 공사기간 연장 사유: 선행공정인 건축 공기연장으로 공사기간 연장요청

라. 예산과목: [명시이월]동부공원여가센터 시설과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용 활성화, 무장애 친화공원 조성, 시설비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	시 설 과 장
시설관리팀장	김현태		시설과장	11/30
김달용
협조자	재무팀장	이종해
시행	시설과-7561	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원여가센터 시설과 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2964	/전송	02-460-2971	/	72proht@seoul.go.kr	/	부분공개(7)