아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청(강북·광암정수장 GB관리계획 변경 및 개발행위허가 용역)

다음 용역 건에 대하여 준공기한 연기를 요청합니다.

1. 용 역 명 : 강북·광암정수장 GB관리계획 변경 및 개발행위허가 용역

2. 준공기한 연기

과업기간	당초	변경	비고
전 체	2023. 9. 19. ~ 2024. 12. 31.	좌동	변경 없음.
1차수	2023. 9. 19. ~ 2023. 12. 31.	2023. 9. 19. ~ 2024. 7. 31.	7개월 연장

붙   임 1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	계 획 설 계 과 장
주무관	민경석		계획설계과장	11/30
백광인
협조자
시행	계획설계과-10485	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 서울시 상수도사업본부 급수부 계획설계과 (합동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1414	/전송	02-3146-1429	/	minks@seoul.go.kr	/	부분공개(5)