아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	건설폐기물처리용역 설계변경 시행 및 계약의뢰(올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사)

우리본부에서 추진중인『올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역』관련 다음과 같이 설계변경 시행 및 계약의뢰하오니 조치바랍니다

가.용 역 명: 올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역

나.용역기간: 2023.4.26.~2023.12.31.

다.계약금액: 금9,397천원

라.업 체 명: 현대환경(주)

마.변경내역

○기간변경

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2023. 4.26. ~ 2023.12.31.	2023. 4.26 .~ 2024. 3.20.

○금액변경

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
용역기간	9,397,600	19,811,000	증)10,413,400

바.변경사유: 현장여건에 따른 폐기물 증•감 및 기간 변경 반영

사.예산사항: 용역증액(10,413천원)은 집행잔액 및 낙찰차액 사용 조치

-한강 접근체계 개선(일반회계), 한강공원 승강기 신설 및 개선, 시설비

붙임  1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.

	기 반 시 설 과 장
주무관	이균휴		기반시설과장	11/30
이석근
협조자	주무관	이준용		기획예산과장	代구혜선
시행	기반시설과-4218	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 한강사업본부 기반시설과	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0676	/전송	02-3780-0744	/	gyunhyu123@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)