문서번호	토목부-22489
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
황태선		박운용	11/30
			이임섭
협조	주무관		박상철
	주무관		이재천

- 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사 건설사업관리용역 -

설계변경 검토보고 (전체 3회, 3차 1회)

2023.  11.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 내부순환로(월곡IC) 구조개선공사 건설사업관리용역 -

설계변경 검토보고 (전체 3회, 3차 1회)

「내부순환로(월곡IC) 구조개선공사 건설사업관리용역」의 용역기간 및 건설사업관리기술인 투입기간 등을 반영한 설계변경 검토 보고임.

□ 관련근거

ㅇ 건설사업관리용역 설계변경 요청(건설산업-23-1450호, '23. 11. 27.)

ㅇ 준공기한 변경 검토 보고(토목부-21698호, '23. 11. 21.)

ㅇ 강교분야 투입기간 연장(토목부-6290호, '23. 04. 07.)

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명: 내부순환로(월곡IC)구조개선공사 건설사업관리용역

ㅇ 용역기간: (전체) '20.02.10. ~ '24.02.29.

(3차) '23.01.01. ~ '24.02.29.

ㅇ 용 역 비: *******************

ㅇ 용 역 사: ***********

□ 보고내용

ㅇ 설계변경 사유

- 전체(3회) : 월곡IC 주변 환경개선공사 등 추가 공사 기간 반영

-  3차(1회) : 건설사업관리기술인 실투입기간 조정, 물가변동 반영 등

⇒**********************************

ㅇ (총차) 건설사업관리기술인 투입 기간 변경

구 분	단위	당초	변경	증·감	비고
책임기술인 (고급)	개월	****	****	*	**** ******
토목 (중급,현장시공)	개월	******	******	*	**** ******
강교 (중급,현장시공)	개월	*	***	***	*******
토목안전 (중급, 안전)	개월	******	******	*	**** ******

ㅇ (3차) 건설사업관리기술인 투입 기간 변경

구 분	단위	당초	변경	증·감	비고
책임기술인 (고급)	개월	**	**	변경없음
토목 (중급,현장시공)	개월	**	**	변경없음
강교 (중급,현장시공)	개월	***	***	1.5	*******
전기 (중급,전기공사)	개월	***	*	3.0	*******
통신 (초급,통신공사)	개월	***	*	1.0	*******
토목안전 (중급, 안전)	개월	**	*****	1.05	******************

ㅇ 용역비 및 용역기간 변경

(단위 :천 원)

구 분		당 초	변 경	증·감		비고
용역금액	총차 (3회)	*********	*********	*	*******
	3차 (1회)	*******	*******	*	*****
용역기간	총차 (3회)	*********************	*********************	*	****
	3차 (1회)	*********************	*********************	*	****

□ 검토의견

ㅇ 상기와 같이「내부순환로 구조개선공사 건설사업관리용역」에 대한 용역기간 및 건설사업관리기술인 실투입기간 조정을 반영한 설계변경(전체3회, 3차1회)은 적정하므로 변경계약 추진코자함.

붙임  1. 건설사업관리단 설계변경 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서(3차분, 총차분) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.