문서번호	기반시설과-4216
결재일자	2023. 11. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장
이균휴		11/30
		이석근
협조

올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역

설 계 변 경   검 토 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 11. 30. (목)

미래한강본부 시설부

(기반시설과)

올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역 설  계  변  경     검  토  보  고

우리 본부에서 추진중인 『올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역』 관련 공사현장 여건 및 실정보고를 반영하여 설계변경하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용 역 개 요

ㅇ용역명: 올림픽대교북단외 1개소 승강기 설치공사 건설폐기물 처리용역

ㅇ위  치: 올림픽대교북단 및 영동대교북단 승강기 공사 현장

ㅇ기  간: 2023. 4.26.~2023.12.31.

ㅇ용역비: 금9,397천원

ㅇ업체명: 현대환경(주)

Ⅱ		설계변경내역

ㅇ 설계변경 사유

- 공사 현장 여건 반영에 따른 물량증감 반영

- 수방기간 공사중단으로 인한 공사기간 연장 반영(기반시설과-4081호,4153호)

ㅇ 용역기간 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2023.4.26.~2023.12.31.	2023.4.26.~2024.3.20.

ㅇ 수량변경

구분	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
폐아스콘	톤	133	133	-
폐콘크리트	톤	73	123	증)50
혼합폐기물	톤	1	100	증)99

ㅇ 용역비 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
용 역 비	9,397,600	19,811,000	10,413,400

Ⅲ		조 치 의 견

ㅇ 현장상황 및 실정보고 내역을 반영하여 설계변경하여 용역추진에

만전을 기하코자 함.

ㅇ 예산조치: 용역 증액(10,413천원)은 집행잔액 및 낙찰차액을 사용하여

증액 조치.

- 한강 접근체계 개선(일반회계), 한강공원 승강기 신설 및 개선,

시설비(401-01)

붙임 1. 변경내역서 1부.

2. 실정보고서 1부. 끝.