아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부공원여가센터
수신	공원운영과장
(경유)
제목	공원조성 분야 공사 관련 건설재해예방 기술지도 용역 준공기한 연기 시행

우리 센터에서 추진 중인「공원조성 분야 공사 관련 건설재해예방 기술지도 용역」건에 대해 아래와 같이 준공기한 연기를 요청드리오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 공원조성 분야 공사 관련 건설재해예방 기술 지도 용역

ㅇ 대상공사 : 9개소

ㅇ 용역기간 : 2023. 03. 29. ~ 11. 30. ※ 15일 이내 1회

ㅇ 용역내용 : 산업재해 예방을 위한 준수사항 기술지도

**********************************

*****************************

□ 준공기한 연기내역

*********************************

****************************************

****************************************************************************************

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부

2. 합의각서 1부

3. 검토보고서 1부.  끝.

	시 설 과 장
주무관	김인표		공원조성팀장	이지영		시설과장	11/30
이정환
협조자
시행	시설과-4862	(	2023. 11. 30.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 중부공원여가센터 4층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3783-5962	/전송	02-3783-5969	/	skyksp1234@seoul.go.kr	/	부분공개(6)