문서번호	미래첨단교통과-17154
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
담당사무관	자율주행팀장	미래첨단교통과장
마동훈	최종선	12/01
		이수진

자율주행차 전용주차장 설치 실정 검토보고(강남자율주행자동차 인프라구축사업)

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업』

자율주행차 전용주차장 확보 실정 검토보고

2023.  12.

도시교통실

(미래첨단교통과)

2023. 6.

택시정책과

(장애인콜택시팀)

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업』

자율주행차 전용주차장 확보 실정 검토보고

미래첨단교통과장 : 이수진☎2133-4950 자율주행팀장 : 최종선☎4961 담당 : 마동훈☎4962

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업』자율주행차 전용주차장 확보 감리 실정보고에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ BND(강남)-2023-25호(2023.11.28.)

- 자율주행차 전용 주차면 타절에 대한 감리검토 의견서 제출

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업

□ 사업기간 : ‘23.07.14. ~ ’24.01.15.

□ 사 업 비 : ***************

□ 감 리 사 : ******

□ 시 공 사 :************************

□ 사업규모

○ 현장 : ***************************************

○ 센터 : ***********************************

□ 공 정 율 : 90%

Ⅲ		실정보고 사항

□ 자율주행차 전용주차장 노면 확보 관계기관 협의

○ 해당구청 : 강남구청, 서초구청

○ 협의일시 : 2023.11.16.~17.

○ 협 의 자 : 강남구청 담당 김지민, 서초구청 담당 이지숙

○ 협의내용 : 구청관할 공용주차장 내 자율주행자동차 전용주차구역 제공

○ 협의결과

지역	수량	협의결과	사 유	비고
***	*******	****************	********************** ****
***	*******	***************	*
*	*******	****************	*

□ 감리 검토의견

○ 자율주행차 전용 주차면 표시 사업은 관할구청 협의결과 주차면 확보가 불가하여 본 공정을 타절하고, 정산시 공사금액을 변경함이 타당하다고 사료됨

□ 보고자 의견

○ 관할구청(서초구, 강남구) 협의결과 공영주차장 주차공간 부족으로 민원이 많이 발생하고 있으며 자율주행차 전용 주차장 제공이 불가하다 하여 본 사업에서 제외하여 사업비 정산하고

○ 차후 강남시범지구 자율주행차 운영사업자가 선정되었을 때 상호 협의하여 적정장소 전용주차 공간확보를 하고자 함

□ 전용주차면 타절에 따른 사업비 증감(직접비)

구분	변경전(원)		변경후(원)		증감(원)	비고
********	***	**********	**	*	***********

Ⅳ		향후계획

□  ’23. 12. 1.        : 자율주행차 전용주차장 타절 승인통보(책임감리원)

□  ’23. 12. 1. ~ 20. : 사업비 정산 및 사업 마무리

□  ’23. 12. 22.       : 사업준공

첨 부 : 감리 검토의견서 1부.  끝.