문서번호	서울숲관리사무소-8846
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
운영팀장	서울숲관리사무소장	동부공원여가센터소장
양혜정	代양혜정	12/01
		김인숙

서울숲 하수관로 개량사업  공원점용허가 연장 검토보고

2023. 12.

동부공원여가센터

(서울숲관리사무소)

서울숲 하수관로 개량사업 점용허가 연장 신청 보고

서울숲공원 내 노후 하수관로 개량사업 추진을 위한 공원 점용허가 연장신청이 있어, 아래와 같이 검토 보고드림 (신청기관 : 성동구)

점용허가 신청개요

○ 위    치 : 서울숲공원(숲속놀이터 앞 산책로~ 커뮤니티센터 앞 산책로)

○ 신 청 자 : 성동구청

○ 점용기간 연장신청내역

- 당 초 : 2023. 9.11. ~ 2023.11.30.

- 변 경 : 2023. 9.11. ~ 2023.12.20.

○ 점용목적 : 하수관로 개량사업시행에 따른 공원점용

※*****

**********************************

***************************************************

********************************

********************************

*************************

******************

○ 점용면적 : 총 1,713㎡

○ 추진경위

- 2023.8.22. : 도시공원 점용허가신청서 접수

- 2023.8.25. : 안전관리계획 협의(서울숲관리사무소-성동구 치수과)

검토내용

○ 대상지 현황

연번	공원명	위 치	도시계획	점용면적 (㎡)	공시지가 (원)
1	서울숲공원	성수동 1가720	도시지역, 자연녹지지역, 공원(저촉), 도로(접합)	1,713	964,900

○ 도시공원점용허가신청서 및 서류 구비 : 완료

○ 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령 제22조(도시공원의 점용허가 대상) : 적정

- 제2항 : 수도관․하수도관․가스관․송유관․가스정압시설․열수송관․공동구 및 지중정착장치(어스앵커)의 설치

○ 서울특별시 도시공원 조례 제13조(점용기간)

- 당초 점용허가기간 : 2023. 9.11. ~ 2023.11.30.(81일)

- 연장기간 : 2023. 9.11. ~ 2023.12.20.(20일 연장)

○ 서울특별시 도시공원 조례 제17조(점용료) : 감면

- 서울특별시 도시공원조례 20조

③ 시장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 점용료를 감면할 수 있다.

3. 지방자치단체가 상ㆍ하수도관, 가스관 및 방화용 저수조의 설치를 위하여 점용하는 경우

○ 공원의 경관과 공중의 이용에 지장 여부 : 공사 중 일시점용

***********

*************************************************

*********************************************

***************************

***************************************************************

************************************

***********************************************************

*****************************

*********************

처리결과

○ 관련법에 의거 검토한 바 점용허가 연장 가능한 사항으로,

○ 점용기간 내 공원이용객 불편사항 및 안전사고가 발생하지 않도록 하며, 공사 중 훼손 시설물 등이 원상복구 완료될 수 있도록 서울숲과 협의하는 조건으로 관련내용을 정리하여 조건부 처리 연장처리하고자 함.

붙임 : 1. 공원점용 연장신청서 1부

2. 공사계획서 1부.

3. 공정표, 보행우회도, 차량진출입계획, 원상복구계획도 각 1부.

4. 도시공원점용허가증 및 승인조건(안) 1부.  끝.