문서번호	건축부-19900
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
손우진		김선경	12/01
			代정채문
협조

「한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원공사」 공사재개 검토보고

「한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원공사」

공사재개 검토보고

2023.  12.

도시기반시설본부

(건축부)

한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 성벽 해체복원공사

공사재개 검토보고

「한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 성벽 해체복원공사」관련하여, 문화재청 설계변경 승인완료에 따른 공사 재개를 검토 보고임

1		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 한양도성 혜화동 전시안내센터 주변 위험구간 성벽 해체복원공사

ㅇ 위    치 : 종로구 창경궁로 35나길(혜화동 23 주변)

ㅇ 공 사 비 : 2,524,512천원

ㅇ 공사기간 : 2021. 8. 13.~2023. 11. 24.

ㅇ 시 공 자 : (주)원택건설 외 1

2		추진경과

ㅇ 21. 8.13. : 공사 착공

ㅇ 23. 4.25. : 제5차 기술지도 및 구조자문 회의

ㅇ 23. 7.10. : 문화재청 현장보고회(문화재 수리 자문회의)

ㅇ 23. 8.21. : 성곽범위 확대 문화재청 결정 지연에 따른 공사중지

ㅇ 23. 9.05. : 문화재청 지침변경 승인

ㅇ 23.11.08. : 제6차 기술지도자문 회의

ㅇ 23.11.22. : 문화재청 설계도면 제출

ㅇ 23.12.01. : 문화재청 설계도면 승인

3		관련근거

ㅇ 공사중지 검토보고 (건축부-13848(2023.8.25.))

ㅇ 지방자체단체 입찰 및 계약기준 제9장(계약 일반조건) 제8절 제6항

ㅇ 설계변경(2차) 승인 통지 (수리기술과-6174(2023.12.1.))

4		검토내용

▢ 공사 재개

ㅇ 문화재청 설계변경 승인에 따른 공사 재개

- 공사 재개일 : 2023. 12. 4.

(공사중지기간 : '23.8.21. ~'23.12.3. 105일)

▢ 준공기한 연장

ㅇ 중지기간 내 준공기한 도래로 예상중지기간(~'23.11.20.)으로 공사기간 연장 선반영

5		처리의견

ㅇ 문화재청 행정절차 이행완료에 따른 공사 재개 실시

ㅇ 추후 변경 계약 시 미반영 중지기간 반영하여 변경계약 예정