문서번호	급수운영과-21144
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
손성우	신중선	12/01
		박종일
협 조

현장 실정 검토보고-5차

(2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

2023. 11

강남수도사업소

(급수운영과)

현장 실정 검토 보고-5차

(2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사)

"2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사"와 관련하여 감독처인 서울시설공단으로부터 현장실정 보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

※관련문서: 서울시설공단 공사감독2처-15922(2023.11.29.)호

Ⅰ		현 황

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 2023년 논현동 외 4개동 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: 2023.05.02. ~ 2023.12.22.

ㅇ 도 급 비: ************

ㅇ 시공내용: *******************

ㅇ 도 급 자: **************

ㅇ 발 주 처: 강남수도사업소(급수운영과)

Ⅱ		공단 요청내용

□ 5구간 작업시간 변경

ㅇ 현황 및 문제점

- 당초 5구간(*****************)은 야간작업으로 설계되었으나, 현장 확인 결과 해당 구간에 인접하여 야간 영업집들이 다수 있으며, 통행인원이 많아 작업이 어려운 실정임.

ㅇ 현장 위치 및 전경

현장위치도	현장전경

ㅇ 공단 검토의견

- 현장 확인결과 공사구간 내 야간 영업점들이 다수 있으며, 인근에 아파트가 있어 야간 작업시 민원이 다수 발생할 것으로 판단됨.

- 따라서, 시공사에서 요청한 5구간 중 *****************의 작업시간을 야간에서 주간으로 변경하는 것은 타당하다고 판단됨.

- *******************

Ⅲ		사업소 검토의견

□ 5구간 작업시간 변경

ㅇ 서울시설공단의 검토의견과 같이 공사구간 야간 상권 및 유동인구와 아파트 야간 소음민원 등을 고려할 때 야간공사에서 주간공사로 작업시간 변경은 적정하다 판단됨.

Ⅳ		행 정 사 항

□ 서울시설공단에 회신

ㅇ 상기 검토의견과 같이 변경사항에 대해 타당하다 판단되므로 향후 설계변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신코자 함.

붙임: 1. 현장실정 검토보고 관련 공문(서울시설공단) 1부.

2. 현장실정보고(시공사) 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.