실정보고 검토서(가시설 임대사용료 정산 반영)

공 사 명

청계천~정릉천 자전거도로 연결공사

공사개요

· 위    치 : 정릉천 및 청계천 합류부

· 공사기간 : '22.12. ~ '23.12.

· 총사업비 : 36억 원

· 시공사 : 태궁종합건설(주)

· 감리단 : 수성엔지니어링 외1개사

실정보고 건명

가시설 임대사용료 정산 반영

관련근거

서울시설공단 도로시설처-21200(2022.12.7) : "교량 공사중 안전조치 요청"

→ 내부순환로 교각기초와 교량 가시설 위치 근접에 따른 교량위치 조정 요청

실정보고 사유

서울시설공단 요청에 따라 교량 위치를 이동하였으며, 그에 따른 가시설(시트파일, H파일) 재시공에 따른 임대사용료를 정산 반영코자함.

건설사업관리단

검토의견

가시설 공사중 인접 구조물로 인한 교량 위치 이동으로 강재 임대기간이 늘어났으며,  품셈에 따른 증가된 가시설 임대기간 반영은 적정한 것으로 판단됨.

변경(안)

구분	당 초	변 경	비고(증·감)
규모	**************** ************** ***************** ******************	**************** ************** ***************** ******************	************** ***************
대상	*************** ***************	*************** ***************	***************** *****************
도급비	********	********	***********

예산조치 계획

총사업비 범위내 시행가능 ( ㅇ )

추가 행정절차 이행 필요여부

발주처

검토의견

******************************************************************************************************************

비 고

결재

주무관

노승환

토목설계과장

박운용

토목부장

12/01

이임섭

협조

주무관

이나영