하나되는 중구, 함께하는 중구
	서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행[장충-8소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역]

우리 구에서 시행 중인『장충-8 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 장충-8 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역

2. 용역기간 : 2023.02.15. ~ 2023.12.28.(2차) / 2022.05.18. ~ 2023.12.28.(총차)

3. 도급업체 : ㈜화신엔지니어링 대표이사 최기영

4. 설계변경 내역

구 분			당초금액(원)	변경금액(원)	증ㆍ감액(원)		비고
총차분	총용역비		605,394,000	608,800,000	(증)	3,406,000
	도급비	공급가액	550,358,182	553,454,545	(증)	3,096,363
		부가세	55,035,818	55,345,455	(증)	309,637
		계	605,394,000	608,800,000	(증)	3,406,000
2차분	총용역비		347,394,000	350,800,000	(증)	3,406,000
	도급비	공급가액	315,812,727	318,909,091	(증)	3,096,364
		부가세	31,581,273	31,890,909	(증)	309,636
		계	347,394,000	350,800,000	(증)	3,406,000

5. 설계변경 사유 : 하수시설물 추가 및 변경 용역시행[치수과-25003호(2023.11.29.)]

6. 예산과목 : 하수시설관리, 소구역 하수관로 정비사업, 장충-8소구역 하수관로 정비사업, 시설비및부대비, 시설비(401-01)[시비, 공기업하수도사업특별회계]

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.
2. 변경설계서 각 1부(2차분, 총차).
3. 방침서 1부.  끝.

주무관	최인영		하수팀장	이성하		치수과장	김규엽		안전건설교통국장	12/01
정욱성
협조자	주무관	김민정		계약팀장	代전지현		재무과장	조덕진
기획재정국장	송인상
시행	치수과-25095	(	2023. 12. 1.	)	접수		(		)
우	04558	서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)	/	http://www.junggu.go.kr
전화	3396-6132	/전송	02-3396-8851	/	ciyciy@junggu.seoul.kr	/	부분공개(5)