문서번호	토목부-22772
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
박성준		박운용	12/04
			代최진우
협 조
	주무관			김종혁

- 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 - 설계변경 검토보고

2023. 12.

도시기반시설본부

토 목 부

- 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계 -

설계변경 검토보고

우리본부에서 추진 중인 『녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계』 용역의 추가과업 등을 반영한 설계변경 검토 보고임.

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계

ㅇ 사업구간 : 은평구 응암동 89-21 ~ 은평구 응암동 114-9

ㅇ 사업규모 : 녹번천 하류부 (연장 337m, 폭 15m)

**	****	********
****	**************************** *****************************	***********************
****	*********** ***************	*********
***	*********	*******

ㅇ 위 치 도

****

□ 추진현황

ㅇ ’18. ~ ’20. : 복개하천 중심의 하천복원 종합계획(치수안전과)

ㅇ ’20.10.24. : *********************

ㅇ ’21.06.01. : 기본 및 실시설계 용역 착수

ㅇ ’22.10.04. : 사업계획 변경 ****************************

******************************************

*********************************************

ㅇ ’22.10.18. : 건설사업관리용역 일시 중지

ㅇ ’22.12.07. : 설계용역 일시 중지

ㅇ ’23.10.20. : ************

*******************************************

ㅇ ’23.10.31. : 복원사업 추진계획 변경사항 통보 (치수안전과 ⇒ 토목부)

***************************************************

************************************************

ㅇ ’23.11.23. : 설계용역, 건설사업관리용역 재개 및 준공기한 연장

□ 설계변경 내용

************************************************************

*****************************************

******************************

ㅇ 설계변경 내역

(단위: 천원)

**		*****	**		**	**	**		**
			**	**			**	**
**********			*********	*********	*	*******	*******	*******	*
***	****		*****	******	******	*****	*	******	******
	****		******	******	******	******	*	******	******
	************		******	******	******	******	*	******	******
	********		*****	*****	*	*****	*	*	*
*******			*****	*****	*	*****	*	*	*
**********			*	******	******	*	*	******	******
***			*****	*****	*	*	*****	*****	*
****			******	******	*	*	******	******	*
*			*********	*********	*******	*******	*******	*********	*******

ㅇ 용역비 증·감사항

***	********	********
***	*********	*********
***	***********	*********
***	************	***********

□ 검토의견

ㅇ 상기 보고내용과 같이 `22.10. 치수안전과의 사업계획 변경 추진에 따른 추가 과업 시행 및 용역 기간연장에 따른 설계변경 사항은 적정하며 추후 설계반영하여 변경계약코자함.

붙임 : 1. 설계용역 설계변경요청서 1식.

2. 건설사업관리자 설계변경요청서 1식.  끝.