문서번호	도로관리과-9017
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	지하안전팀장	도로관리과장	안전총괄관		재난안전관리실장
윤진성	천석기	김만호	김혁		12/01
					최진석
협 조
	주무관			이창민

2023년 공동조사용역(1-2권역) 준공 보고

2023년 공동조사용역(1-2권역) 준공 보고

2023.  11.

재난안전관리실

(도로관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 공동조사용역(1-2권역) 준공 보고

도로관리과장 : 김만호☎2133-8150 지하안전팀장 : 천석기☎8180 담당 : 윤진성☎8138

지반침하 예방을 위하여 수행한 「2023년 공동조사용역(1-2권역)」사업이 종료되어 과업내용 결과 및 준공 사항을 보고드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 공동조사용역(1-2권역)

ㅇ 용역목적 : 공동을 정확히 발견하여 지반침하에 선제적 대응

ㅇ 계약기간 : 2023. 4. 19. ~ 11. 30.

ㅇ 계약금액 : 1,730,000천원(부가가치세 포함)

ㅇ 계약업체 : ㈜아이리스테크놀로지 (공동도급 : ㈜제이에스이앤씨)

ㅇ 과업내용 : 공동조사 1,403km(차도 1,046㎞, 보도 304㎞, 굴착공사장 주변 53㎞)

	⇨		⇨
< 공동탐지 >		< 공동확인 >		< 공동복구 >

□ 추진경위

ㅇ ’22.08.24. : ’23년 공동조사용역 시행계획 수립(도로관리과-27495호)

ㅇ ’23.03.30. : 사업수행능력 평가(입찰공고(’23.3.2.) 후 4개 컨소시엄 참가)

ㅇ ’23.04.19. : 계약 및 착수

ㅇ ’23.08.08. : 수량조정 검토(도로관리과-2363호)

ㅇ ’23.10.16. : 설계변경 검토(도로관리과-6122호)

ㅇ ’23.10.19. : 변경계약 체결(과업내 수량조정, 금액변경 및 과업기간 연장)

□ 준공내용

ㅇ 공동조사 1,468㎞, 공동 465개 발견, 신속복구(채움재 주입) 401개

- 종로구, 중구, 노원구, 마포구 등 17개 자치구(율곡로, 퇴계로, 동일로, 마포대로 등)

- 차도 1,108㎞, 보도 304㎞, 굴착공사장 주변 56㎞

구 분	규 격	계약수량	수행결과	수행율	비고
1차 탐사 (공동탐지)	차량형 GPR (보·차도 조사)	1,403km	1,468km	105%	조사연장은 1차로 기준임 · 정기조사 : 975㎞(5개년 중 1권역) · 추가조사 : 437㎞(침하우려구간) · 굴착공사장 주변 : 56㎞(140개소)
2차 조사 (공동발견)	핸드형 GPR, 천공, 내시경촬영	380개소	465개소	122%	공동발견율 : 0.32개/km (차도 0.39, 보도 0.05, 공사장 0.34)
신속복구	채움재 주입	344개소	401개소	117%	채움재주입 ┌ 복구완료 : 338개 └ 복구안됨 : 63개 굴착복구(맨홀, 하수관 인접) : 64개

※ 맨홀, 하수관 인접 및 채움재 미복구 공동 127개소는 사업소에서 순차적으로 굴착복구

· 채움재 미복구 공동 : 공동 예상 체적량의 2배의 채움재를 주입해도 복구가 안되는 공동

ㅇ 공동발견율 높은 구간(공동발견율 0.35개/㎞ 이상)은 ’24년 특별점검 수행

******************************

*******************************************************************************************************************************

****

□ 보고자 의견

ㅇ 계약기간 내 모든 과업을 완료하였기에 준공 처리하고자 함

ㅇ 준공금액 : 1,730,000,000원(금회 지출액 820,000,000원)

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 예산과목

① 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로함몰 예방사업, 시설비

▸ 금회 지출액 520,000,000원

② 재난안전정책과, 재해 및 재난예방, 재난 예방 및 복구, 재난예방(재난관리기금 재난계정), 시설비

▸ 금회 지출액 300,000,000원

□ 행정사항

ㅇ 지하시설물별 분담금 부과 조치 및 성과품 배포(’23.12월말)

붙임. 준공신고서 1부.  끝.