문서번호	시설관리과-10770
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		상수도사업본부부본부장
박건수	양해선	전태호		12/01
				권민
협 조

대형 제수밸브 점검정비 용역(강북지역)

설계변경 시행 보고

2023. 11.

상수도사업본부

(시설부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

대형 제수밸브 점검정비 용역(강북지역)

설계변경 시행 보고

시설부장 : 전태호☎3146-1501 시설관리과장 : 양해선☎1530 담당 : 박건수☎1533

우리 본부에서 시행중인「대형 제수밸브 점검정비 용역」의 계약금액 변경 및 준공기한 연기 설계변경을 시행하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 대형 제수밸브 점검․정비 용역(강남지역)

ㅇ 용역대상

- 400㎜이상 버터플라이밸브(강남지역 1,794개 : 설치 후 3년 이상 경과)

ㅇ 용역기간 : '23. 3. 27. ~ 12. 22.(271일)

연번	용 역 명	사업규모	계약금액 (천원)	용역사
계		************	*********
1	대형제수밸브 점검정비 용역(중부,서부지역)	**********	********	************
2	대형제수밸브 점검정비 용역(동부,북부지역)	**********	********	************

□ 주요 과업내용

ㅇ 대형제수밸브(D400mm 이상) 및 밸브실 점검정비

- 버터플라이 밸브 기어박스 분해 및 윤활유 교체

- 누수 확인 및 노후 볼트 너트 교체

- 밸브 파손상태, 녹발생 등 외관조사

- 밸브 작동 여부 확인

<밸브실 환기>	<볼트점검 및 교체>	<기어박스 운활유 주입>	<밸브세척>

□ 추진 경위

ㅇ '23. 3. 27. : 용역 착수

ㅇ '23. 4.  3. : 용역 착수 전 자체 안전교육 실시(건양, 이준)

ㅇ '23. 4. 18. : 안전교육 및 장비점검 실시(대현산배수지)

ㅇ '23. 4. 21. : 착수보고회 개최

ㅇ '23. 10. 5. : 중간보고회 개최

('23. 11. 15. 기준, 개소)

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	비 고
대 상		*****	***	***	***	***	****** *** ************
실 적	수행	*****	***	***	***	***
	비율	*****	****	*****	*****	****

□ 설계변경 내용

ㅇ 계약금액 변경

- *********************************************

구 분		당 초		변 경		비 고
중부, 서부	공종	밸브 및 밸브실 점검정비	*****	밸브 및 밸브실 점검정비	*****	점검·정비 결과 향후 정산 예정
				밸브 및 밸브실 점검	****
				밸브 및 밸브실 부분점검	***
동부, 북부		밸브 및 밸브실 점검정비	*****	밸브 및 밸브실 점검정비	*****
				밸브 및 밸브실 점검	****
				밸브 및 밸브실 부분점검	****

ㅇ 준공기한 연기(공정률 99.5%, '23. 11. 15. 기준)

- ***************************************************************

- *****************************************

- 귀책여부 : 계약상대자 귀책 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

구 분		당 초	변 경	비 고
대형 제수밸브 점검정비 용역(중부,서부지역)	용역기간	**********************	***************************	*****
대형 제수밸브 점검정비 용역(동부,북부지역)		**********************	***************************	*****

□ 계약금액 변경 내역

ㅇ 변경 내역(중부, 서부)

(단위 : 천원)

명 칭	단위	당 초		변 경		증·감	비 고
		수량	금 액	수량	금 액	금 액
1.직접인건비			*******		*******	******
점검·정비(주,야,휴일)	개소	***	*******	***	*******	******
점검(400~700mm,주)	개소	*	*	**	***	***	신규공종
점검(400~700mm,야,휴일)	개소	*	*	**	*****	*****
점검(800~1600mm,주)	개소	*	*	*	***	***
점검(800~1600mm,야,휴일)	개소	*	*	*	**	**
점검(1650mm이상,주)	개소	*	*	*	***	**
점검(1650mm이상,야,휴일)	개소	*	*	*	***	***
부분점검(주)	개소	*	*	*	**	**
부분점검(야)	개소	*	*	*	**	**
제경비 및 기술료	식	*	*******	*	*******	******
2.직접경비	식	*	*******	*	*******	*****
소 계			*******		*******	******
산업안전보건관리비 등			******		******	****
도 급 비			*******		*******	******

ㅇ 변경 내역(동부, 북부)

(단위 : 천원)

명 칭	단위	당 초		변 경		증·감	비 고
		수량	금 액	수량	금 액	금 액
1.직접인건비			*******		*******	*******
점검·정비(주,야,휴일)	개소	***	*******	***	*******	*******
점검(400~700mm,주)	개소	*	*	**	***	***	신규공종
점검(400~700mm,야,휴일)	개소	*	*	*	***	***
점검(800~1600mm,주)	개소	*	*	*	***	***
점검(800~1600mm,야,휴일)	개소	*	*	*	***	***
점검(1650mm이상,주)	개소	*	*	*	***	***
점검(1650mm이상,야,휴일)	개소	*	*	*	***	***
부분점검(주)	개소	*	*	*	**	**
부분점검(야)	개소	*	*	*	**	**
제경비 및 기술료	식	*	*******	*	*******	*******
2.직접경비	식	*	*******	*	*******	******
소 계			*******		*******	******
산업안전보건관리비 등			******		******	****
도 급 비			*******		*******	******

□ 향후 계획

ㅇ 사업소 조치 항목에 대해 추가점검 시행(용역기간 연장 예정 : ’24. 3. 29.)

ㅇ 용역 계약금액 변경 및 준공기한 연기 의뢰(→ 본부 재무회계과)

ㅇ 점검정비 물량 증감은 최종 설계변경 시 정산 처리

붙임 : 1. 설계 변경 요약보고서 각 1부.

2. 설계 변경 내역서 각 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 각 1부.

4 . 합의각서 각 1부.

5 . 대형 제수밸브 미점검 항목 개선방안 1부.  끝.