문서번호	기반시설과-4243
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김성현		代송재우	12/01
			이유국
협 조

계약변경 검토보고

- 2023년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

시설부 기반시설과

한강사업본부

기반시설과

계약변경 검토보고

- 2023년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역 -

『2023년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역』의 실정보고 반영 및 계약변경에 대한 검토 보고임.

1		검 토 근 거

******************************************

2		용 역 개 요

◯ 용 역 명 : 2023년 한강 수경시설 전기안전관리대행 용역

◯ 용역대상 : 뚝섬 음악분수 외 4개소 전기설비

◯ 용역기간 : '23. 1. 1. ~ '23. 12. 31.

◯ 용역금액 : ****************************

◯ 용 역 사 : **********

3		계약변경 검토

공원명	분수명	수전전압 (V)	변경 전		변경 후		비고
			계약용량 (kW)	점검 횟수(월)	계약용량 (kW)	점검 횟수(월)
난지 한강공원	거울분수	22,900	350	2회 이상	600	3회 이상

※ 난지 거울분수는 수상레포츠 통합센터로 350kW(점검횟수 월 2회) → 600kW(점검횟수 월 3회)으로 증설(22. 9.)되어 운용

4		계약변경 증·감

구 분	용 역 비(원)		증 감
	계약금액	변경금액
****	**********	**********	***********
*****	*********	*********	*********
******	**********	**********	***********

5		검 토 의 견

◯ 용역사부터 보고된 실정보고 검토한바, 계약용량 증설에 따른 실 점검

횟수(2회→3회) 반영에 대해 적절하다고 판단되어 변경하고자 함.

6		향 후 계 획

◯ 변경계약 의뢰(본부 총무과).

붙임  1. 실정보고 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.