문서번호	방재시설부-14917
결재일자	2023. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		代홍민철	12/01
			代한병찬
협 조
	주무관			代홍민철

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설사업관리용역 -

설계변경[전체7회, 6차 2회] 검토 보고

2023. 11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설사업관리용역 -

설계변경(전체7회, 6차2회) 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설사업관리용역」관련 공정계획을 반영한 건설사업관리기술인 배치기간 연장에 따른 설계변경 검토보고 임

※ 관련근거 : 이산(S)2023-7817호(2023.11.30.)

1		용역개요

ㅇ 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 위    치 : 서울시 양천구 신월IC ~ 화곡지하차도 BOX 시점

ㅇ 용역내용 : 당해 건설공사 전반에 대한 건설사업관리용역

ㅇ 용역기간 : 총차 ‘16.10.04.~‘25.01.31.(6차 : ‘22.12.08~‘23.12.06)

ㅇ 용 역 비 : 7,300,600천원 (6차 : 1,000,000천원)

ㅇ 용 역 사 : ㈜이산 외 3개사

2		보고내용

ㅇ 설계변경 사유

- 6차(2회) : 공정계획을 반영한 건설사업관리기술인 배치기간 연장

ㅇ 설계변경 현황

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총차	용역기간	2016. 10. 04. ~ 2025.01.31.	2016. 10. 04. ~ 2025. 01. 31.	-
	용역금액	7,300,600,000원	7,300,600,000원	-
6차	용역기간	2022. 12. 08. ~ 2023. 12. 06.	2022. 12. 08. ~ 2024. 01. 03.	증) 0.91개월
	용역금액	1,000,000,000원	1,072,960,000원	증) 72,960,000원

ㅇ 6차분 변경 현황

- 용역비 및 용역기간 변경

구 분	6차분			비고
	당 초	변 경	증 · 감
1. 용역비	1,000,000,000원	1,072,960,000원	증) 72,960,000원
- 배치기간 연장	-	72,960,000원	증) 72,960,000원
2. 용역기간	‘22.12.08~’23.12.06	‘22.12.08~’24.01.03	증) 0.91개월

- 건설사업관리기술인 투입계획 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
특급기술인(책임)	11.82개월	12.73개월	증) 0.91개월
고급기술인(토목)	11.82개월	12.73개월	증) 0.91개월
고급기술인(안전)	11.82개월	12.73개월	증) 0.91개월
중급기술인(토목)	11.82개월	12.73개월	증) 0.91개월
기술지원기술인	11.82개월	12.73개월	증) 0.91개월

3		책임건설사업관리기술인 검토의견

ㅇ 공정계획을 반영한 건설사업관리기술인의 투입계획 변경에 따른 배치기간 변경사항임

4		보고자 의견

ㅇ 건설사업관리용역(6차) 공정계획을 반영한 건설사업관리기술인의 배치기간을 연장한 내용은 적정하다고 판단되는 바, 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 변경계약 설계서 1부.  끝.