문서번호	물재생시설과-16579
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
최상훈		이경주	12/04
			김윤수
협조

「물재생센터 매뉴얼 개정 용역」

준공기한 연기 검토

2023.  12. 4. (월)

물순환안전국

(물재생시설과)

「물재생센터 매뉴얼 개정 용역」

준공기한 연기 검토

「물재생센터 매뉴얼********* 개정 용역」에 대해서 추가 자료준비, 현장점검 등을 위해 용역사에서 준공기한 연기를 요청하여 검토, 보고합니다.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명: 물재생센터 매뉴얼(악취관리·운영) 개정 용역

□ 과업기간: ’23. 10. 17.~’23. 12. 29.

□ 계약금액: ********

□ 수행기관: **********

□ 과업범위 및 내용

ㅇ ****************************

ㅇ ********************

Ⅱ		추 진 경 과

□ ’23. 10. 13.   용역 계약 체결

□ ’23. 10. 17.   용역 착수

□ ’23. 10. 25.   용역 착수보고회 개최

□ ’23. 10. 25.~  용역 시행, 최종보고 준비 등

Ⅲ		계약변경 검토

□ 변경 사유

ㅇ ***************************************************************

ㅇ *******************************************************

- *******************************************************************

□ 계약변경내역

ㅇ 사 업 명 : ************************

ㅇ 변경내역

건 명	당초 기한	변경 기한
계약기간	’23. 10. 17.~’23. 12. 29. (3개월)	************************ *****
계약금액	********	******

Ⅳ		향 후 계 획

□ *******************************

□ ************************

□ *******************

붙임  : **** 1부.  끝.