문서번호	시설보수과-5398
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	난지물재생센터소장
배준희	조선행	12/04
		이문주
협 조

슬러지 1,2처리장 대기환경설비 설치 인허가 대행용역 준공기한 연장 검토보고

2023.02.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

슬러지 1, 2처리장 대기환경설비 설치 인허가 대행 용역

납품기한 연장 검토보고

「슬러지 1, 2처리장 대기환경설비 설치 인허가 대행 용역」 건의 준공기한 연장에 대하여 검토하고 보고드림

▢ 사업개요

○ 사 업 명 : 슬러지 1, 2처리장 대기환경설비 인허가 대행 용역

○ 계약금액 : 금18,287,000원(금일천팔백이십팔만칠천원)

○ 계약방법 : 수의계약(우영엔지어링, 대표: 홍문일)

○ 계약내용 : 개발제한구역 내 공작물(대기환경설비) 2대 설치에 필요한 인허가 업무 대행 용역

○ 준공기한 : 2023.11.26.

▢ 변경내역

○ 준공기한 연장

당 초	2023년 05월 01일 ~ 2023년 11월 26일
변 경	2023년 11월 26일 ~ 2024년 06월 28일

※ 계약금액 변경없음

○ 연장사유 : 고양시청 자체 검토에 따른 인허가 승인 지연

- 용역 진행 현황 : 인허가(도시관리계획 실시계획) 인가 신청서 제출 및 승인 대기

- 연장사유 귀책소재 : 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 행정사항

○ 준공기한 연기의뢰 : 관리과

붙  임 : 합의각서 1부.  끝.