문서번호	시설관리과-21262
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
조영범	양창진	이재학		12/04
				정진일
협 조

「2023년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)」

설계변경 검토보고

2023. 12

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

「2023년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)」

설계변경 검토보고

우리사업소에서 시행중인「2023년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기

계속단가계약)」의 신규공종 및 계약 물량 증감 발생에 따른 설계변경 및 심의위원회 개최 계획을 보고 드림.

□ 계약현황

○ 사 업 명 : 2023년 아리수올림터 등 모터펌프 수리(장기계속단가계약)

○ 계 약 자 : ******************

○ 계약기간 : 2023. 5. 15. ~ 2022. 4. 30.

○ 계약금액 : ****************************

- 1차수 계약금액 : *********************

- 2차수 계약금액 : **************************

○ 사업내용

- 아리수올림터·배수지 등 기계설비 수리

(모터펌프 10HP×1대, 15HP×1대, 20HP×1대 수리 및 기타 부대설비 수리 1식)

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규 77호, ’17.01.23.)       - 제15장 물품계약 일반조건 제6절 수량조절과 계약금액의 조정

□ 설계변경 검토내역

○ 설계변경 사유

- 기계설비 유지보수에 따른 신규공종 및 시공물량 증·감 발생

○ 설계변경 금액 : 계약금액(총차) 변경없음                       (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총 부기금액		**********	**********		****
1차수	’23년 계약금액	**********	**********	**	**********
2차수	’24년 계약금액	**********	**********	**	**********

○ 설계변경 내역(1차수)

공 종	규 격	단위	당초수량	변경수량	비고(증감)
펌프수리(오류1증압장)	11Kw이하	대	1	-	감	-1
펌프수리(궁동2증압장)	15Kw이하	대	1	-	감	-1
펌프수리(우장산가압장)	유량50㎥/h이하	대	0	1	증	1
펌프교체(신정배수지)	1.5Kw이하	대	0	1	증	1
작업사다리 설치(유량계실)		대	0	4	증	4
전기방식 시설물 정비		식	0	1	증	1

- 계약물량 증가

․ 신규공종 : 펌프수리 및 교체, 작업사다리 설치, 전기방식 시설물 정비 등

- 계약물량 감소

․ 물량감소 : 펌프수리(10HP, 15HP), 기타 부대설비 등

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일    시 : 2023.12.05.(화) 10:00

○ 장    소 : 사업소 4층 회의실

○ 심의내용 : 설계변경 타당성 검토

○ 심의의원

- 위원장 : 시설관리과장

- 위  원 : 시설관리팀장외 3명

- 간  사 : 공업6급 조영범

□ 행정사항

○ 설계변경심의위원회 심의결과에 따라 설계변경 시행.

붙임  1. 변경 및 계약내역서 각 1부

2. 설계변경 심의 결과서(양식) 1부.  끝.