아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	슬러지 1,2 처리장 대기환경설비 설치 인허가 대행 용역

1. 시설보수과-5398호(2023.12.04.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인「슬러지 1,2처리장 대기환경설비 설치 인허가 대행용역」사업의 준공기한 연기를 다음과 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 슬러지 1,2처리장 대기환경설비 설치 인허가 대행용역

나. 계약금액 : 금18,287,000원(금일천팔백이십팔만칠천원)

다. 업 체 명 : (주)우영엔지니어링(대표: 홍문일)

라. 준공기한 : 2023.11.26.

마. 변경내역

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약금액	금18,287,000원	좌동	변경없음
계약기간	2023.05.01. ~ 2023.11.26.	2023.05.01. ~ 2024.06.28.

붙  임 : 1. 납품기한 연장 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	시 설 보 수 과 장
주무관	배준희		시설보수과장	12/04
조선행
협조자
시행	시설보수과-5401	(	2023. 12. 4.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8554	/전송	02-300-8569	/	qmwem3231@seoul.go.kr	/	부분공개(5)