문서번호	정수시설과-10403
결재일자	2023. 12. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
조강혁		정인영	12/04
			서한호
협 조
	행정관리과장			박세중
	주무관			이구연
	주무관			김광묵

「침전지 슬러지수집기 철거, 설치공사」

변경계약(공사기간 연장) 검토보고

2023. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

「침전지 슬러지수집기 철거, 설치공사」

변경계약(공사기간 연장) 검토보고

우리정수센터에서 추진 중인 ‘침전지 슬러지수집기 철거, 설치공사’과 관련하여 공사기한을 연장하고자 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 계 약 명 : 침전지 슬러지수집기 철거, 설치공사

ㅇ 사업규모

- 로프견인형 슬러지수집기 4대 (1지당 대차 2대) 설치

- 현장제어반 2대 설치

ㅇ 계약금액 : 금250,402,600원

ㅇ 계약업체 : (주)빅뱅

ㅇ 계약기간 : ’23.10.30.~’24.01.04.

ㅇ 물품 및 공사 분리발주 현황

구 분	물품 제작 구매	철거·설치공사
계약업체	(주)주원엔텍	(주)빅뱅
계약금액	금279,881,800원	금250,402,600원
계약기간	'23.9.21.~'24.1.19.	'23.10.30.~'24.1.4.
계약번호	*************	**************

□ 검토내용

ㅇ 철거·설치공사 변경사항

구 분	변경 전	변경 후	비고
계약기간	*********************	*********************	*****
계약금액	************	****

ㅇ 변경사유 : 선행공정(물품제작구매)에 따른 공사 일정 순연

- 슬러지 수집기 교체 사업은 물품구매[(주)주원엔텍]와 철거·설치 공사[(주)빅뱅]가 분리된 사업으로서, 물품 납품기한은 '24.1.19.로서 제작일정 단축 및 조기 물품 수령 후, 11월 설치공사 착공을 목표하였으나,

- 물품 제작일정 단축이 불가하여, '23.12.8. 공장검수 후, 12월 중 물품인도 예정되어, 후행공정(설치공사) 기한 재조정 필요

- 또한, 동절기 수질관리 및 공사 현장 안전사고 예방을 위하여 공사기간 연장 필요하다고 판단됨

ㅇ 지체상금 : 미부과(귀책사유 없음)

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 불가피한 사유에 의한 공사기한의 연장이 적정하다고 판단되는바 변경계약(공사기간연장)을 추진하고자 함.  끝.

붙임  1. 선행공정(주원엔텍) 물품구매 공장검수 1부.
2. 후행공정(빅뱅) 설치공사 합의각서 1부.  끝.