문서번호	설비부-19684
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		곽용길	12/05
			신용휴
협 조

「신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사」 설계변경 검토보고(총차, 1차)

「신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사」

설계변경 검토보고(총차, 1차)

2023. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사」

설계변경 검토보고(총차, 1차)

『신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 건에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함)건설 소방공사

ㅇ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2일대

ㅇ 규    모 : 버스 주차장 및 빗물저류조 조성

- 설비규모 : 지상 및 지하1층 주차면 101대, 지하2층 저류조 V=35,000㎥

ㅇ 계약현황

****	***	**	****	*******
****	********	**	***********************	***********
		**	***********************	***********

ㅇ 건설사업관리단 : (주)제일엔지니어링 외 2개사

□ 관련근거

**************************************************************************

□ 검토내용

ㅇ 설계변경 사유

- 선행공종 지연으로 관리동, 설비동, 정비동간 공사내역서 수량 변경 및 임시소방시설 설치 등

ㅇ 도급비 변경 내용

**	********			***
	**	**	***
**	***********	***********	****
**	***********	***********	****

ㅇ 주요 변경 내용(1차)

**	**	**	**			**
			**	**	**
** ** **	******	************	*	*	*
***	***** *****	*******	*****	*****	***
	***** *****	****	**	*	***
	***	***********	***	***	**
***	***** *****	*******	***	*	****
	***** *****	****	*	*	**
	***	***********	*	*	**
***	***** *****	*******	**	*	***
	***** *****	****	*	*	**
	***	***********	*	*	**

ㅇ 건설사업관리인 검토의견

- 상기 내용과 같이 검토한 결과 1차4회 변경은 계약금액 변동 없이 선행 공종 지연으로 관리동, 설비동, 정비동간 공사내역서 수량변경 및 임시소방시설 설치로 설계변경이 적정함.

- 금번 설계변경(내역서 수량 조정)은 타당하다고 사료됨.

□ 보고자의견

ㅇ 건설사업관리기술단이 제출한 설계변경 내용이 적정하다고 사료되어 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임  감리단 요청 공문 1부.  끝.