문서번호	시설보수과-11368
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
남주형	정병구	안준수	12/05
			代유은중
협 조

-『녹번천복개 정밀안전진단 및 증산교 외 2개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역』- 설계변경(3차) 검토보고

2023. 12.

서부도로사업소

(시설보수과)

-『녹번천복개 정밀안전진단 및 증산교 외 2개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역』-

설계변경(3차) 검토보고

우리사업소에서 시행중인 『녹번천복개 정밀안전진단 및 증산교 외 2개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역』관련하여 과업추가에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

	Ⅰ		추 진 근 거

○ 삼각지고가차도 현황 및 바닥판 열화상태 조사 계획

○ 정밀점검 자문회의(2023.11.27.) 의견 반영

- 발주청과 협의하여 삼각지고가차도 바닥판 열화상태 조사 및 코어채취

	Ⅱ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 녹번천복개 정밀안전진단 및 증산교 외 2개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역

○ 용역기간 : 2023. 4. 7. ~ 2024. 4. 5.(365일)

○ 대상시설 현황

시설물명	위 치	연장 (m)	폭 (m)	설계하중	준공년도	종별	등급
녹번천복개	녹번동 42-1∼응암동 91-15번지	3,331	8.9~23.2	DB-18	1980	1종	B
증산교	북가좌동 371-1	60	35	DB-18	1970	법정외	B
한강로다리	한강로 3가 40-664	16.24	61.5	DB-18	1979	법정외	B
이태원지하차도	이태원동 540-34	350	15	-	1977	2종	B
퇴계로지하차도	중구 충무로2가 61-3	240	15	-	1971	3종	B
의주로지하차도	중구순화동 121-2~207	250	16	-	1974	3종	B
삼각지고가차도	용산구 한강로 1가	395	15.5	DB-18	1974	2종	C

***********************

******************************

	Ⅲ		추 진 경 위

○ 2023. 2. 22. : 용역 발주

○ 2023. 4.  7. : 용역 착수

○ 2023. 4. 27. : 착수보고회 개최

○ 2023. 9. 14. : 중간보고회 개최

○ 2023. 11.28. : 정밀안전점검 대상 자문회의 개최

	Ⅳ		설계변경 개요 및 검토의견

○ 설계변경 사유

***************************************************

****************************************************

○ 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
용역비	계	***********	***********	*****************
	공급가액	**********	**********	****************
	부가가치세	***********	***********	***************

○ 검토의견 : 위와 같은 사유로 용역비 증액이 있어 설계변경 시행하고 사업추진에 철저를 기하고자 함.

○ 예산확보 방안

- ************************************************************

*************

(단위: 원)

예산과목	발주금액	원인행위액	낙찰차액
***************	***********	***********	**********

	Ⅴ		향 후 계 획

○ 2023. 12. 05. : 설계변경(3차) 시행

○ 2024. 4월    : 용역 준공

붙임 : 1. 삼각지고가차도 현황 및 바닥판 열화에 따른 조사 계획 1부.

2. 설계(변경) 내역서 1부.  끝.