문서번호	토목부-22906
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	12/05
			代최진우
협조
	주무관		이상현

- 성산대교 본교 성능개선공사 -

실정보고(강교 트러스부 도장수량 변경) 검토 보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 성산대교 본교 성능개선공사 -

실정보고(강교 트러스부 도장수량 변경) 검토 보고

강교 트러스부 도장수량 변경 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

□ 근    거

ㅇ 강교 TRUSS부 도장수량 변경 실정보고(성산본교 23-148호, `23. 10. 10.)

□ 공사개요

ㅇ 사 업 명 : 성산대교 본교 성능개선공사

ㅇ 규    모 : 교량 성능개선(DB18→DB24, B=27.0m, L=880.0m)

ㅇ 총사업비 :********************************************************

ㅇ 사업기간 : `21. 01. 20. ∼ `25. 10. 25.

- *********************************************************************

- ****************************************************************

ㅇ 시 공 사 : *************

ㅇ 감 리 사 : *********

□ 실정보고 검토

	실정보고 내용
ㅇ 강교 트러스부 도장수량 변경 - TRUSS 각부재의 설계누락 된 아치플레이트, 수평브레이싱 등의 도장수량 추가 - TRUSS 수직재 및 사재의 경우 밀폐된 구조이고 내부공간 협소로 내부 도장 불가로 도장수량 삭제 ※ 외부도장은 변동 없음

ㅇ 추진경과

- `23. 09. 19. : 도장수량 변경 실정보고(시공사 → 감리단)

- `23. 09. 20. : 건설사업관리단 접수 및 검토

- `23. 09. 21. : 설계사(평화엔지니어링) 도장수량 변경 의견 요청

⇒ 경영권 매각 진행 중으로 모든 임직원 연락 두절로 의견제출 불가

- `23. 10. 10. : 기술지원기술인(시공분야) 검토 지시(건설사업관리 업무수행지침 제97조(설계변경관리)

⇒ 기술검토 및 시공상 문제점 등의 검토를 할 때에는 건설사업관리용역

사업자의 본사 기술지원기술인 등을 활용

⇒ 당초 설계수량 산출시 누락분 반영 및 공간협소, 작업 불가 부위

수량 삭제 적정의견 제출

ㅇ 공사위치도(P5~P11, TRUSS부)

P5 P11 P6 P7 P8 P9 P10 P4 P12
TRUSS부재	TRUSS 취약부(ECB, 앵커리지 등)

ㅇ TRUSS부 도장수량 추가

구 분	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
***********	*	*******	********	*******
***********	*	*******	*******	******
*		********	********	*******

※ TRUSS 각부재의 설계누락 된 아치플레이트, 수평브레이싱 등의 도장수량 추가.

※ 현수부 도장수량은 바닥판 교체공사 후 수량 증.감을 조사하여 별도 실정보고 예정.

ㅇ TRUSS부 부재별 도장수량 증가물량

구 분		단위	합 계	아치 플레이트	브라켓	상현재 (내부격벽)	하현재 (내부격벽)	하부수평 브레이싱	합류부 (내부격벽)	ECB (내부격벽)	앵커리지 (내부격벽)
합 계			******	*****	*****	*****	*****	*****	*****	***	*****
외부	일반부	㎡	******	******	******	***	***	******	****	***	***
	취약부	㎡	*****	***	***	***	***	***	***	***	******
내부	일반부	㎡	*****	***	***	******	******	***	******	***	***
	취약부	㎡	*****	***	***	***	***	***	***	****	****

ㅇ TRUSS부 도장수량 삭제 물량(수직재 및 사재 내부도장)

구 분		단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
불소수지도장	외부	㎡	*****	*****	****
	내부	㎡	*****	*	******
계			******	*****	******

※ TRUSS 수직재 및 사재 외부도장은 수량오류(9Span→7Span) 수정.

※ TRUSS 수직재 및 사재의 경우 밀폐된 구조이고 내부공간 협소(300*400 ~ 600*1,000)로 인해

내부 도장이 불가하여 도장수량 삭제.

수직재 (V1~V5) 사재 (D1~D6)	※내부규격 : 400×400mm ~ 600×1000mm

ㅇ 수량 증·감 내역

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 공사비 증·감 내역 *************

(단위:천원)

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 증가된 공사량은 계약단가 적용

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 강교 TRUSS부의 도장수량 증·감 사항은 적정한 것으로 판단되며        향후 설계 변경에 반영 하고자 함.

붙 임 : 1. 건설사업관리단 실정보고서 1부.

2. 원 설계자 의견요청 관련 검토 보고서 1부. 끝.