문서번호	기전과-13545
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
성지창		채충일	12/05
			차창훈
협조
	주무관		이래운

「23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(1차공사) 검토 보고

2023. 12. 5.(화)

남부도로사업소

(기 전 과)

「23/24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(1차공사) 검토 보고

기전과장:채충일☎3284-5430  담당 :성지창☎5456

「23,24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)」와 관련하여 공사 시행 중 민원처리, 현장여건에 따른 물량 증·감 및 풍수해 재난대응 지하차도 현장관리관 배치 등 발생하여 설계변경 검토·시행하고자 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

ㅇ「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

ㅇ「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제9장(공사계약 일반조건)

제6절(공사 설계의 변경) 및 제7절(계약금액의 조정)

ㅇ「풍수해 재난대응 지하차도 통제 운영방안」(시설보수과-7283호(2023.8.9.))

- 현장통제반 구성: 지하차도별 현장 책임관 및 관리관 지정운영

※ 연간단가 등 공사업체 활용하여 현장관리관 지하차도 배치

Ⅱ		공사 개요

ㅇ 공 사 명: 23,24년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

ㅇ 공사내용: 터널 및 지하차도 기전설비 유지보수 등

ㅇ 공사기간 및 계약금액

**********************************************

***********************************************

***********************************************

ㅇ 계약업체 : ****************

Ⅲ		추진 경위

□ 작업지시(1차~4차)

ㅇ '23. 8. 23. 작업지시(1차) 시행

ㅇ '23. 9. 21. 작업지시(2차) 시행

ㅇ '23.11.  1. 작업지시(3차) 시행

ㅇ '23.11. 27. 작업지시(4차) 시행

□ 풍수해 대비 지하차도 현장관리관 출동 내역

ㅇ '23.9.18. 시설보수과에서 현장관리관 지하차도 출동 시간 통보

**	**	****	**	*****	*****
*	*****	**************	***********	*
*	*****	**************	*************	***	*
*	*****	**************	***********	***
*	*****	**************	*************	**	*
*	*****	**************	***********	*	*
*	*****	**************	***********	***
***				****	**

******

***************************************************

*************************************************

Ⅳ		검토 보고

□ 관련 근거

ㅇ 제1차 작업완료 보고서 접수(기전과-9626호(2023.9.11.))

ㅇ 제2차 작업완료 보고서 접수(기전과-10674호(2023.10.6.))

ㅇ 제3차 작업완료 보고서 접수(기전과-12615호(2023.11.17.))

ㅇ 제4차 작업완료 보고서 접수(기전과-13344호(2023.12.1.))

□ 예산 집행내역                                        (단위: 천원)

***** ****	*************					*
	**	**	**	**	**** *****
*******	******	*****	******	******	*****	*******
	*****	****	*****	*****	****	******

□ 예산 집행계획

ㅇ 도로기전시설물 일상유지보수 시설비 집행잔액 사용

*****	****	*****	****
******** ******	***********	***********	**********
******	***********	***********	**********

□ 주요 작업내용

*****************************

************************************

*************************

**********************

**************************************

***************************************

□ 설계 변경 내용(세부내역은 첨부문서 참조)

ㅇ 계약 공종별 수량 변경 및 제경비 정산 등

□ 설계변경 내역                                        (단위: 천원)

****	****	****	*****	**
**********************	***********	***********	*********
***********************	***********	***********	*********	****
**********************	***********	***********

- 예산과목: 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅴ		검토 결과

ㅇ 설계변경 검토 의견

- 1차~4차 작업지시 내용대로 작업 완료

- 풍수해 재난대응 지하차도 현장관리관(연간단가) 배치(출동) 반영

- 실제 시공에 따른 물량 변경 및 제경비 정산을 적정하게 설계변경에 반영

- 위 검토 보고와 같이 「23,24년 도로기전시서물 유지보수공사(연간단가)-1차공사」  준공 처리하고자 함

Ⅵ		향후 계획

ㅇ '23.12. 6. : 변경계약 의뢰(→ 관리단속과)

ㅇ '23.12.15. : 공사준공 및 대금 지급

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 풍수해 재난대응 지하차도 통제 운영방안(시설보수과-7283호) 1부.  끝.