문서번호	보행자전거과-17547
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자전거도로팀장	보행자전거과장
박지훈		代조규영	12/05
			이선희
협조

『상암·잠실지역 보조간선도로망 구축에 따른』

사업예산 재배정 검토보고

2023. 12.

도 시 교 통 실

(보행자전거과)

『상암·잠실지역 보조간선도로망 구축에 따른』

사업예산 재배정 검토보고

자전거 보조간선도로망 구축 공사와 관련하여 하반기 노임단가 상승 등으로 도로관리청(송파구청)으로부터 예산 추가 요청이 있어 검토한 바, 정비가 필요한 실정이므로 공사비 추가 재배정 하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 상암·잠실지역 보조간선도로망 구축에 따른 사업예산 재배정 추진계획 보고

- 서울시 보행자전거과-11801호(2023.08.10.)

ㅇ 예산 재배정 요청(잠실지역 일대 자전거도로 정비공사)

- 송파구 도로관리과-38986호(2023.11.30.)

□ 예산 신청현황

ㅇ 신청기관 : 송파구청 도로과

ㅇ 사업위치 : 자전거 보조간선도로망 구축 구간(송파지역)

기 존	변 경

ㅇ 변경사유

- 석촌호수로 보행공간재편사업 추진에 따른 신설구간 제외

- 포장 및 노면표시 상태 양호에 따른 보수구간 일부 제외

ㅇ ****************

ㅇ 요청사유 : 하반기 노임단가 등 공사비 증액으로 인한 사업비 재배정 필요

□ 검토결과

ㅇ 잠실지역 내 자전거도로 보수구간 중 노면표시 및 포장상태 불량으로 인하여 정비가 시급한 실정으로 예산 배정이 필요함

ㅇ 자전거 보조간선도로망 구축 공사비의 경우 상암·잠실지역 예산 배정 후 남아있는 222,423천원을 추가 배정

□ 향후계획

ㅇ 재배정 예산 금액 내 공사 완료토록 조치 통보

ㅇ 예산 추가 재배정 후 공사기간('23.11. ~ '24.7.)에 따라 사고이월 추진

붙  임 : 예산 재배정 요청공문(송파구청 도로과) 1부.  끝.