【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서

(2023년 올림픽로(주공아파트앞) 장기사용 배수관 정비공사)

부분공개(5,7)

시 행	급수운영과-19960
시행일자	2023. 12. 5.
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장 (안전조사과장)
접수번호
접수일자

주무관		급수관리팀장	급수운영과장			결재
장승화		김종섭	12/05
			이규희
협 조

공 사 명	2023년 올림픽로(주공아파트앞) 장기사용 배수관 정비공사		요청기관	강동수도사업소
공사위치	송파구 잠실역사거리 ~ 잠실3사거리 간
공사기간	2023. 5. 22.~2024. 7. 2.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
계약금액 (최초계약 금액)	*************** *****************
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	장기사용송배수관정비	시설비
공사개요	D=200~900mm, L=813m
설 계 자	․상 호: (주)KG엔지니어링종합건축사무소 ․대 표 자: 천병희 ․책임기술자: 박덕기 (전화번호: 02-2161-1778)
발 주 자	․담 당 자: 장승화 (전화번호: 02-3146-5152)
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 송파구 잠실역사거리 ~ 잠실3사거리간 하수박스 등 지장물으로 인한 공정 변경(강관 하월 공사, S-gate 등) 및 토공, 무설공 등 수량 증가로 도급비 증액 - 당초: *************** 변경: ******************************
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부( 공문 및 검토보고서, 설계변경내역서(수량산출서 등 포함))

끝.