아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(한강스카이워크 설치 타당성 조사 용역)

1. 자연성회복과-3412호(2023.12.5.)와 관련입니다.

2.『한강스카이워크(구리암사대교~고덕천간) 설치 타당성 조사 용역』에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명: 한강스카이워크(구리암사대교~고덕천간) 설치 타당성 조사 용역

나. 용역기간: 2023. 3. 2. ~ 12. 15.

다. 도 급 비: 금88,111,110원

라. 도 급 자 : (주) 문창 대표 김명철

마. 준공기한 연기

┌ 당   초 : 2023. 3. 2. ~ 2023. 12. 15.

└ 변    경 : 2023. 3. 2. ~ 2024.  2. 29.

*******************

***********************

*******************************************

*******************

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	자연성회복과장
주무관	양민영		자연성회복과장	12/05
代송하연
협조자
시행	자연성회복과-3418	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0858	/전송	02-3780-0745	/	jjyang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)