문서번호	건축부-20106
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
김동석		김선경	12/05
			代정채문
협조
	주무관		오지형

『서울 어울림체육센터 건립공사』

2차수 조정에 따른 변경계약 검토 보고

2023. 12. 5.(화)

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

2차수 조정에 따른 변경계약 검토 보고

『서울 어울림체육센터 건립공사』의 효율적인 공사진행 및 예산관리를 위해 차수별 공사내용을 조정하여 변경계약을 추진하고자 검토하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치: 서울특별시 노원구 상계동 1268

ㅇ 규    모: 지하 2층 / 지상 3층, 연면적 14,779.98㎡

(수영장 10레인, 볼링장 32레인, 다목적 체육관 등)

ㅇ ********************

*************************************

ㅇ 공사기간: '22. 7. 25.~'25. 7. 7. (35개월)

***********************************************************

ㅇ 시 공 사: ㈜코원건설 외 1개사(건축, 토목, 조경)

ㅇ 건설사업관리용역사: ㈜토문엔지니어링 건축사사무소 외 2개사

ㅇ 공 정 율: 29.9%

□ 추진경위

ㅇ '19. 12. ~ 21. 5.   : 설계용역 실시

ㅇ '22. 7. 29.   : 공사 계약

ㅇ '22. 7. 25.   : 공사 착공(건축, 토목, 조경)

ㅇ '23. 9. 12.   : 제1회 설계변경 계약

ㅇ '23. 9. 18.   : 1차수 공사 준공

ㅇ '23. 9. 19.   : 2차수 공사 착공

□ 준공 정산 내용

********

*************************************************

*******

*************************************

*************************************

******************************

ㅇ 계약금액 및 공사기간 변경 검토

****		****	****	*******	**
**	**	***************	***************	****
	**	********************	********************	****
***	**	**************	**************	***************
	**	*********************	*********************	******

************************************

ㅇ 예산과목: 도시기반시설본부 건축부, 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 확충, 서울 어울림체육센터 건립, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 관광체육국 체육정책과)

*******************

***************************************************************************

□ 처리의견

ㅇ 건설사업관리용역사업자의 검토 의견이 적정하여 2차수 계약금액 조정을 시행하고자 함.

붙임: 1. 2차수 내역변경에 따른 계약금액 요청 1부.

2. 설계변경 내역서(2차수) 1부.  끝.