아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	(수정) 준공기한 연장 계약변경 의뢰 - 금화터널 제연설비, 수배전반, 전기공사 감리용역

우리 사업소에서 시행 중인 「금화터널 제연설비, 수배전반 전기공사 감리용역」 건에

대하여 아래와 같이 준공기한을 연장하고자 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명: 금화터널 제연설비, 수배전반 전기공사 감리용역

나. 계약업체: 한빛디엔에스(주)  (대표 이현화)

다. 계약금액: 금20,400,000원(금이천사십만원)

라. 용역기간: '23.7.10. ~ '23.12.6. (계약일 : '23.6.20.)

마. 변경사유 :  전기공사 공정 및 준공검사에 따른 용역기간 연장(귀책사유 : 발주처)

바. 변경사항

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
용역기간	'23.7.10. ~ '23.12.6.	'23.7.10. ~ '23.12.20.

바. 예산과목 : 기전과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로터널 방재시설 개선, 시설비및부대비, 감리비

붙임  1. 기한연장 검토보고 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	곽영두		기전과장	12/05
최경주
협조자	주무관	권의현
시행	기전과-15236	(	2023. 12. 5.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	youngdoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)