문서번호	미래첨단교통과-17351
결재일자	2023. 12. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대중교통정보팀장	미래첨단교통과장
전성완		가순종	전결 12/05
			이수진
협 조
	주무관			김영민

2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사 외 1건

건설재해예방 기술지도용역 설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

도 시 교 통 실

(미래첨단교통과)

2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사 외 1건

건설재해예방 기술지도용역 설계변경(정산) 보고

미래첨단교통과장 : 이수진☎2133-4950 대중교통정보팀장 :가순종☎4968 담당 : 전성완☎4970

우리과에서 시행중인 「2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사 외 1건 건설재해예방기술지도 용역」에 대하여 정산에 따른 설계변경을 시행코자 함

Ⅰ		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2023년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사 외 1건                 건설재해예방기술지도 용역

ㅇ 계약기간 : 2023. 7. 14. ~ 12. 31.

ㅇ 사업내용

- 버스정보안내단말기(BIT) 설치 전기공사 및 통신공사에 대한 건설       재해예방기술지도 시행

ㅇ 계 약 자 : *****************

ㅇ 계약금액 : *******

Ⅱ		설계변경 내용

ㅇ 설계변경 사유 : 공사업체 현장 시공시 건설재해예방 기술지도를                           실시하여 기술지도 실시 횟수 조정에 따른 감액

ㅇ 변경내용 및 변경금액

(단위 : 회, 원)

구 분	변 경 전		변 경 후		증 감
	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	**	*********	**	*********	*********	*****************
BIT 설치 전기공사 기술지도용역(주간)	**	*********	*	*********	*********	***************
BIT 설치 전기공사 기술지도용역(야간)	*	*******	*	*******	*	*
BIT 설치 통신공사 기술지도용역(주간)	*	*********	*	*********	*********	***************

Ⅲ		조치의견

ㅇ 상기 변경내용과 같이 설계변경(정산)을 시행하고 준공처리코자 함

Ⅳ		행정사항

ㅇ 설계변경(정산)에 따른 변경계약 의뢰              ………(재무과)

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.