문서번호	정수시설과-3886
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		代손영일	12/06
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철

설계변경 시행 보고

['23년 전기설비 유지보수공사-총차(2회)·1차(정산)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 시행 보고

['23년 전기설비 유지보수공사-총차(2회)·1차(정산)]

2023년 전기설비 유지보수공사(연간단가)」시행 중 설계변경 사항이 발생하여 다음과 같이 변경 시행하고자 함.

Ⅰ				공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2023년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

□ 공사기간 : 총차 - 2023.04.10. ~ 2024.03.31.

1차  - 2023.04.10. ~ 2023.12.31.

□ 계약금액 : 금87,394,000원(1차 : 62,048,000원)

□ 도 급 자 : ***************

□ 공사내용 : 전기설비 유지보수 공사 1식

Ⅱ				설계변경 내용

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증·감액	변경횟수
	당 초	변 경
총 차	87,394,000	87,394,000	-	2회
1 차	62,048,000	61,848,000	감)200,000	2회(정산)

※ 작업지시 결과 및 향후 내역(2차)이 반영된 물량 증·감과 신규 공종 추가

(총차-계약금액 변경없음, 1차-설계변경 및 정산)

□ 적용단가

○ 기존단가 : 계약단가 적용

○ 신규단가 : 낙찰율(87.745%) 적용

□ 주요 변경내용(1차)

공 종	주요 변경사항	사 유
계약 공종	-기존내역 물량증감 (별첨 내역서 참조)	작업지시 결과 물량증감 반영
분전반 설치 및 철거(신규)	-분전반(700*900*200) 교체 1면	체육시설동 노후분전반
PVC박스 설치 (신규)	-PVC박스(300*300*150) 설치 5개	수문유입밸브실 배수펌프 약품투입동 에어컨 체육시설동 에어컨
배선용 및 누전차단기 설치 (신규)	-배선용차단기(50AF,4P) 2개 -누전차단기(50AF,4P) 2개 -누전차단기(100AF,4P) 1개	약품투입동 에어컨 체육시설동 에어컨
제경비	-산업안전보건관리비 정산 -보험(건강,연금,노인장기) 정산 -고용개선지원비(주휴수당) 정산	미가입 및 불충족에 따른 정산

Ⅲ				향 후 계 획

□ 2023년 전기설비 유지보수 공사 설계변경 사항에 대한 심의위원회를 개최하고, 심의결과에 따라 설계변경 시행

□ 추진일정

○ 심의위원회 개최 및 보고 : 2023.12.07.

○ 설계변경 시행 : 2023.12.07.

○ 1차계약 정산 및 준공 : 2023.12월

○ 2차계약 시행 : 2024.01월

붙임 : 1. 설계변경 내역서(총차,1차) 1부.

2. 검증확인서(총차,1차) 2부.

3. 합의각서 1부. 끝.