문서번호	도로보수과-12883
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
온지현		김순수	12/06
			代이우승
협 조

도로중앙분리대 설치수량 변경(정산) 검토보고

2023. 12.

북부도로사업소

(도로보수과)

도로중앙분리대 설치수량 변경(정산) 검토보고

우리 사업소에서 시행중인『2023년 무단횡단금지시설 설치사업』과 관련, 도로중앙분리대 실 시공수량을 반영하여 계약 변경 하고자 함.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 2023년 무단횡단금지시설 설치사업

□ 계약건명 : 도로중앙분리대 구매(2단계 경쟁)

□ 납품요구번호 : ****************

□ 계약수량 : 224경간

□ 계약금액 : 109,451,860원 (조달수수료 포함)

Ⅱ		보고내용

□ 무단횡단금지시설(도로중앙분리대) 공사완료 보고건 [MSRD 2023-22호, 2023.12.1.]

**********************************

○ 변경내용

품 명	설치수량					소요예산(천원)						비고
	당초	변경		증·감		당초		변경		증·감
도로중앙분리대	***		***		****		*******		*******		*******

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

□ 검토의견

********************************************

**********************************

□ 조치계획

******************************

Ⅳ		향후일정

□ 2023. 12. 6.  관급자재 수량변경 요청 (→관리단속과)

□ 2023. 12.     관급자재 납품 검수

붙  임 1. 관련문서(공사 완료보고) 1부.

2. 현장조사 사진 1부.  끝.