문서번호	미래첨단교통과-17396
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
담당사무관	자율주행팀장	미래첨단교통과장
마동훈	최종선	12/06
		代최영순

설계변경 및 보험료 정산 시행보고(강남시범지구 자율주행차 인프라구축사업)

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업』

설계변경 및 보험료 정산 시행보고

2023.  12.

도시교통실

(미래첨단교통과)

2023. 6.

택시정책과

(장애인콜택시팀)

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업』

설계변경 및 보험료 정산 시행보고

미래첨단교통과장 : 이수진☎2133-4950 자율주행팀장 : 최종선☎4961 담당 : 마동훈☎4962

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업』설계변경 및 보험료 정산에 대하여  검토하고 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 미래첨단교통과-17154호(2023.12.01.)

- 자율주행차 전용주차장 확보 실정 검토보고

□ BND(강남)-2023-28호(2023.12.06.)

- 설계변경 내역서 제출(책임감리원 검토)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업

□ 사업기간 : ‘23.07.14. ~ ’24.01.15.

□ 사 업 비 : ***************

□ 감 리 사 : ******

□ 시 공 사 :************************

□ 사업규모

○ 현장 : ***************************************

○ 센터 : ***********************************

□ 공 정 율 : 95%

Ⅲ		설계변경 및 보험료 정산

□ 변경(정산) 금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증감액
	당초	변경
***	*************	*************	***********

※ 계약기간 변동없음

□ 주요 변경내용

건 명	주요 변경사항	사 유	증감금액(원)
**** ************ ************ **	************* ******* ******************	************************************	***********
	********* ******************* *************** *************** ********************* ******************* *****************	**************************** *******************************	**********
	*****	********	********
	****	******************************	**********
	*		***********

□ 책임감리 검토의견

○ 설계변경 내역서 검토결과 자율주행차 전용주차면 물량 감소 및 보험료 정산이 적합하고 원가계산 기준에 의거 적정하게 산출되었음

□ 보고자 의견

○ 전용주차면 물량감소 및 보험료 증빙자료 미제출에 의한 정산이 타당하여 설계변경 시행하고자 함

Ⅳ		향후계획

□  설계변경 및 보험료 정산 반영하여 변경계약 의뢰(재무과)

첨 부 : 1. 설계변경 내역서(책임감리원 검토) 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.