문서번호	기전과-8959
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
홍정완		문동하	12/06
			심형보
협 조

『재난 통합관리를 위한 기전상황실 개선 사업』

사고이월 검토 보고

2023. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

『재난 통합관리를 위한 기전상황실 개선 사업』

사고이월 검토 보고

재난 통합관리를 위한 기전상황실 개선사업 예산 재배정(8월말) 기준, 사업기간 7개월(23년9월~24년3월) 소요로 연내 사업완료가 불가하여 사고이월을 통해 사업추진에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

ㅇ 2023 회계연도 예산 사고이월 대상 사업 제출 요청

(도로시설과-7371, 2023.11.28.)

2		사 업 개 요

ㅇ 사 업 명 : 재난 통합관리를 위한 기전상황실 개선사업

ㅇ 위    치 : 성동도로사업소 기전상황실

ㅇ 사업기간 : 2023. 9월 ~ 2024. 3월

ㅇ 사 업 비 : ********

ㅇ 사업내용 : 기전상황실 리모델링 및 제어시스템 등 첨단화 설비로 교체

3		추 진 현 황

ㅇ 2023.08.03. : 재난통합관리를 위한 기전상황실 개선사업 추진계획(기전과-5044호)

ㅇ 2023.08.10. : 기전상황실 개선사업 재난관리기금 신청(기전과-5319호)

ㅇ 2023.08.30. : 예산 재배정 통보(재난안전정책과-3502호,도로시설과-5944호)

ㅇ 2023.09.21.~11.05 : 기전상황실 개선 설계 용역(기전과-6697호)

ㅇ 2023.11.03. : 재난통합관리를 위한 기전상황실 개선사업 발주계획(기전과-7860호)

ㅇ 2023.11.06.~11.15 : 각 공사(건축,인테리어,전기) 및 관급자재 발주

ㅇ 2023.11.22. : 각 공사 계약체결 알림(관리단속과-8450,8451,8452호)

ㅇ 2023.12.01. : 각 공사 착공

4		사고이월 내역

ㅇ 사고이월 사유

- 23년 8월 말 예산 재배정 이후 재난 통합관리를 위한 기전상황실 개선 사업기간(23년9월~24년3월)은 7개월로 연내 사업완료가 불가능하여 사고이월하고자 함

ㅇ 사고이월 내역

(단위 : 원)

구 분	재배정액	원인행위액	지출액(예정액)	사고이월액
시설비	*************	*************	**********	*************

ㅇ 예산과목 : 재해및재난예방, 재난예방및복구, 재난예방(재난관리기금재난계정),

시설비및부대비, 시설비(예산편성부서:재난안전관리실재난안전정책과)

5		조 치 의 견

ㅇ 상기와 같은 실정으로 원활한 사업추진 및 효율적인 예산 집행, 불용예산 최소화를 위해 사고이월 추진하고자 함

6		향 후 계 획

ㅇ 2023. 12. : 사고이월 요청(→ 도로시설과,재난안전정책과)

ㅇ 2023. 03. : 공사 준공 및 자재 납품 설치 완료

붙임  1. 2023 회계연도 사고이월 요구서 1부.

2. 사고이월 사업별 명세서 1부.  끝.