문서번호	시설관리과-19989
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	북부수도사업소장
이성남	김영민	代조규환	12/06
			권태규

2023년 북부수도사업소 전기설비 유지보수공사

(장기계속계약) 설계변경(2회) 계획 보고

2023. 12.

북부수도사업소

(시 설 관 리 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 북부수도사업소

전기설비 유지보수공사(장기계속계약) 설계변경(2회) 계획 보고

시설관리과장 :이규현☎3390 기전팀장 :김영민☎3414 담당 :이성남☎3416

우리사업소에서 시행중인「2023년 북부수도사업소 전기설비 유지보수공사(장기계속계약)」 관련하여 설계변경 후 기성정산(신규공종 발생 및 시공물량 변경)코자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 2023년 북부수도사업소 전기설비 유지보수공사(장기계속계약)

□ 계약기간: 2023. 4. 1.~2024. 3. 31.

□ 계약금액: ************

□ 계약업체: *****************

□ 공사규모: 아리수올림터, 배수지, 증압장 전기설비 유지보수공사 1식

Ⅱ		설계변경 내용

□ 설계변경사유

- 신규공종 및 시공물량 증·감 발생 ***************

- 국민·건강보험료 및 안전관리비 등 정산

□ 설계변경 금액

(단위: 원)

구 분	변경내역		증·감액	비고
	당초	변경
***	**********	**********	*
********	**********	**********	************
********	**********	*********	************

□ 금번 기성(2회) 금액(3차 작업금액)

(단위: 원)

***	******		*******	**
	*******	*******	*******
**********	**********	**********	**********	*

□ 주요 설계변경 내역

공 종	단위	기존	변경	증·감
********	*	*	*	***
*********	*	*	*	***
**********	*	*	*	***
**********	*	*	*	***

Ⅲ		조치의견

□ 상기와 같이 공사시행 중 발생한 신규물량 및 시공물량에 따른 설계변경심의소위원회를 개최 그 결과를 반영하여 설계변경 및 1차수 준공(2회 기성)처리코자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부

2. 준공 내역서 1부.  끝.