문서번호	미래첨단교통과-17539
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
담당사무관	자율주행팀장	미래첨단교통과장
마동훈	최종선	12/07
		代최영순

설계변경 및 보험료 정산 시행보고(강남시범지구 자율주행차 인프라구축사업)

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축 감리용역』

설계변경 및 보험료 정산 시행보고

2023.  12.

도시교통실

(미래첨단교통과)

2023. 6.

택시정책과

(장애인콜택시팀)

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축 감리용역』

설계변경 및 보험료 정산 시행보고

미래첨단교통과장 : 이수진☎2133-4950 자율주행팀장 : 최종선☎4961 담당 : 마동훈☎4962

『강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라구축사업 감리용역』설계변경 및 보험료 정산에 대하여  검토하고 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 미래첨단교통과-17154호(2023.12.01.)

- 자율주행차 전용주차장 확보 실정 검토보고

□ 엔지니어링 사업대가의 기준 제5조(대가의 조정)

- 엔지니어링사업 계약에 있어 사업기간, 사업규모 변경 등 계약의

내용이 변경된 경우

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 강남자율주행자동차 시범운행지구 자율주행지원 인프라(C-ITS)구축사업 감리용역

□ 사업기간 :************************

□ 계약금액 : ************

□ 계약업체 :**********

□ 사업규모(감리용역 규모)

○ 현장 : ***************************************

○ 센터 : ***********************************

□ 공 정 율 : 95%

Ⅲ		설계변경 및 보험료 정산

□ 변경사항

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증감
****	**********	**********	***********
****	*************************	*************************	****

□ 주요 변경내용

○ 계약금액

건 명	주요 변경사항	사 유	증감금액(원)
**** ************ ************ *******	**************** **** ********************** ********************** **** ********************** **********************	*************** **************** *********************** ****************** ******************** ********	********
	********	******************************	**********
	*********	************* ***************	**********
	********	************	********
	*		**********

○ 계약기간

- 사업물량 및 기간 감소로 인한  감리 계약기간 단축(66일)

· 당초: '23. 07. 05.∼'24. 03. 05  →  변경: '23. 07. 05∼'23. 12. 30.

- 강남 시범지구(강남구, 서초구) 관할 공영주차장 내 주차구역 협소로 인한

자율주행차 전용 주차장 확보 불가로 주차노면 표시 물량 감소(20면)

□ 보고자 의견

○ 사업량 감소(물량감소 및 기간 단축) 및 보험료 정산이 타당하여 설계변경 시행하고자 함

Ⅳ		향후계획

□  설계변경 및 보험료 정산 반영하여 변경계약 의뢰(재무과)

첨 부 : 1. 감리용역 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 및 감리보증보험증권 각 1부.  끝.