아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업 4공구 현장대리인
(경유)
제목	착공계 승인 통보(GTX-A노선 4공구)

1. 상수도 행정이 적극 협조하여 주시는 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서 제출하신 「수도권광역급행철도 A노선 4공구 건설공사 중 상수도 이설공사」착공계를 검토후 의견과 승인 조건을 아래과 같이 회신하오니 공사에 반영하고 상수도 공사 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 검토의견 및 주요 승인조건

가. 착공 전 공사시에 발생되는 원인자 부담금(퇴수 및 세척비용, 측량비, 출동경비 등)을 납부 기한 내 납부 하여야 함 (붙임2 고지서)

나. 착공 전 시공상세도 수정 제출(붙임3 참조) 및 단수 시행시 최소 5일전까지 단수계획서를 사전 제출하여 사업소와 협의하여야 함.

다. 공사시행시 상수도 전문 건설사업관리기술자를 상시배치하여야 함.

라. 공사구간 및 경계에 설치된 상수도밸브는 임의로 조작해서는 안되며 사전에 우리사업소에 연락하여 수계조절요원 입회하에 밸브조작하여야함.

마. 착공 3일전 측량의뢰하여 GIS 측량팀 입회하에 공사실시하며 공사종료 후 10일 이내에 공사사진, 준공도면, 속성자료 등 관련 서류를 첨부하여 준공계를 제출하여야 함.

바. 기타 세부사항 붙임 승인조건(붙임1) 확인.

3. 아울러 제출하신 작업계획서에 미포함된 공사 시 사업소와 사전 협의 후 추가로 착공서류를 제출하여야 함을 안내드립니다.

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	성동제		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	12/07
권승계
협조자
시행	시설관리과-20671	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3693	/전송	02-3146-3739	/	pjung223@seoul.go.kr	/	부분공개(6)