문서번호	수상공간조성과-3005
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수상공간조성과장	한강전략사업부장
박지정		권혁제	12/06
			이호진
협조
	주무관		이준용

「한강 아트피어 기본계획 및 타당성조사 용역」

계약 변경 검토 보고

2023. 12. 6. (수)

미래한강본부

(수상공간조성과)

계약 변경 검토 보고

한강전략사업부장 : 이호진☎3780-0870 수상공간조성과장 : 권혁제☎0874 담당 : 박지정☎0863

「한강 아트피어 조성 사업」의 기본계획 및 타당성조사 용역 1차

용역 기간 변경을 위한 검토내용을 보고 드림

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 한강 아트피어 조성 기본계획 및 타당성조사 용역

ㅇ 용역업체 : ㈜유신, 주원선박기술, ㈜유신건축종합건축사무소

ㅇ 용 역 비 : 금379,822,350원

ㅇ 용역기간 : ’23.6.29. ~ ’24.6.28.(착수일부터 총 365일)

- 장기계속용역 (1차: '23.6.29. ~ 12.31. / 2차: '24.1.1. ~ 6.28.)

□ 추진 사항

ㅇ ’23. 7.26. : 용역 착수보고회

ㅇ ’23. 9.15. : 한강 아트피어 전담TF 구성

********************************************

ㅇ ’23. 9.19. : 공유재산 심의 (적정)

ㅇ ’23.10.16. : 시 투자심사 심의 (조건부 2단계)

ㅇ ’23.11.21. : 공유재산관리계획 심의 (원안의결)

□ 보고 내용

**********************************************

*************************************************

********

*******************************************

***********************************************

ㅇ 계약 변경 (안)

(단위 : 원)

구 분	총차 (전체)		1 차		2 차
	당 초	변경	당 초	변 경	당 초	변 경
*****	***********	*******	***********	*******	**********	*******
****	********* ***********	*******	********* ********	********* ***********	******** *******	******** *******
***	*		******		******

************************************

□ 추진계획(안)

ㅇ ’23.12.11.   계약 변경 요청(총무과) 및 시행

ㅇ ~ ’24. 3.30.   1차 용역 준공

ㅇ ~ ’24. 6.28.   전체 용역 준공

붙임  1. 예정 공정표 1부.

2. 합의각서 및 준공기한 연기 의뢰서 각 1부.  끝.