문서번호	토목부-22960
결재일자	2023. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
노승환		박운용	12/06
			代최진우
협조
	주무관		이나영

- 강남순환도시고속도로 건설공사(8공구) - 실정보고(매헌지하차도 부대시설 추가설치) 검토 보고

- 강남순환도시고속도로 건설공사(8공구) -

실정보고(매헌지하차도 부대시설 추가설치) 검토 보고

2023. 12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 강남순환도시고속도로 건설공사(8공구) -

실정보고(매헌지하차도 부대시설 추가설치) 검토 보고

매헌지하차도 상부도로 구간의 민원사항 및 인수인계(서초구청) 협의사항 등을 추가 반영코자 검토보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 건설공사

○ 공사규모 : 연장 7.96km, 왕복 4~10차로(교량 2개소, 지하차도 4개소)

○ 공사기간 : 2002.7.3 ~ 2024. 12. 31

○ 도 급 비 : 3,564억원

○ 시공사/건설사업단 : 롯데건설(주) 외1 / ㈜동명기술공단

Ⅱ		관 련 근 거

○ '23.03.01. : 매헌지하차도 상부도로 시설물 인수인계 합동점검 실시

○ '23.04.13. : 시설물 인수인계 합동점검 결과 알림(서초구 도로과)

○ '23.04.20. : 매헌지하차도 광역상수도 이설공사 보완조치 요청(한국수자원공사)

○ '23.08.17. : 화물트럭터미널 사거리 교통불편 민원 접수(토목부-15243호)

Ⅲ		검 토 사 항

○ 실정보고 사유

- 매헌지하차도 화물트럭터미널 사거리의 민원사항(수서방향 좌회전 주행불편)과 상부도로 인수인계중 서초구에서 요구한 보완사항을 반영코자 하며,

- 한국수자원공사 요청에 따른 '관로표지못 → RF센서' 대체 설치를 반영코자 함.

검 토 사 항

서초구 양재동 223-1  주변 2개소 2면 도로표지판 교체

○ 실정보고 내용

- 양재대로 11길 직진차로 신설로 인한 도로표지판 교체

검 토 사 항

※ 도로표지판 문안변경 심의 완료('23.08.11.)

- 화물트럭터미널 사거리 오토갤러리 좌회전 추가 차선도색(컬러레인, 유도선)

- 상수관로 RF센서 교체 설치 반영

※ RF센서 기반 관로인식체계 기준 제·개정에 따른 한국수자원공사 요청사항으로 기존 관로표지못을 RF센서로 교체(RF센서 33개 교체반영)

Ⅳ		공 사 비 검 토

○ 수량 변경 현황

공 종		규 격	단위	수 량			비 고
				당초	변경	증․감
부대공	이정표지판 교체	4.45 x 2.20	개소	-	2	2
	차선도색	융착형, 백색파선	㎡	-	6	6
		컬러레인	㎡	-	57	57
	RF센서	표면형	기	-	33	33

○ 공사비 증·감

구 분	금 액(천원)			비 고
	당초	변경	증․감
직접공사비	-	8,757	8,757
제 경 비	-	9,063	9,063
도 급 액	-	17,820	17,820

Ⅴ		조 치 계 획

○ 매헌지하차도 상부도로 부대시설 추가 설치와 관련하여 책임건설기술인의 검토보고는 타당하다고 판단되며 설계변경하여 반영코자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술인 검토의견서 1부.  끝.