아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 신규단가 적용 회신(서울 어울림체육센터 건립공사))

1.업무지시현장 : 서울 어울림체육센터 건립공사(장기1차) 엘앤케이경원건설(주), 서울

어울림체육센터 건립공사(장기1차) (주)코원건설, 서울 어울림체육센

터 건립공사(장기1차) 주식회사 종합건축사사무소가람건축, 서울 어울

림체육센터 건립공사(장기1차) (주)토문엔지니어링 건축사사무소, 서

울 어울림체육센터 건립공사(장기1차) 주식회사 신한종합건축사사무소

, 서울 어울림체육센터 건립공사(장기1차) 지산토건(주)

2.작 성 일 자 : 2023-12-07 13:12:20

3.지 시 내 용 :

가. 어울림 제2312-014(2023.12.7.)호와 관련입니다.

나. 우리 본부에서 진행 중인 「서울 어울림체육센터 건립공사」와 관련한 발파암 파쇄 공법 선정 실정보고 건에 대한 신규단가 적용기준은 요청하신 아래비율로 적용코자 회신합니다.

- 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 그 단가의 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 적용(설계가의 91.146%).  끝.

주무관	하성현		문화시설과장	代김동석		건축부장	12/07
代정채문
협조자
시행	건축부-20351	(	2023. 12. 7.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동), 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2243	/전송	02-6438-2299	/	hapago@seoul.go.kr	/	부분공개(5)