문서번호	정수시설과-3902
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		최병희	12/07
			윤준성
협 조

설계변경 심의결과 보고

[2023년 전기설비 유지보수공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의결과 보고

['23년 전기설비 유지보수공사(연간단가)]

「2023년 전기설비 유지보수공사(연간단가)」시행중, 설계변경(2회)에 대한 심의를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ				심 의 개 요

□ 심의일시 : 2023.12.07.(목) 10:00

□ 장    소 : 강북아리수정수센터 정수시설과

□ 참 석 자 : 6명

○ 위 원 장 : ******

○ 위    원 : ********************************

○ 담 당 자 : 공업6급 손영일

□ 안    건 :

○ 2023년 전기설비 유지보수공사(연간단가) 설계변경 적정여부

Ⅱ				설계변경 내용

□ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	계약금액		증감액
	당 초	변 경
*****	**********	**********	*
******	**********	**********	**********

□ 주요 변경사유

○ 물량 증·감 사항 발생 및 신규 공정 반영

○ 산업안전보건관리비 및 보험(건강,연금,노인장기) 등 제경비 정산

□ 주요 변경내용

공 종	주요 변경사항	사 유
계약 공종	-기존내역 물량증감 (별첨 내역서 참조)	작업지시, 물량증감 반영
분전반 설치 및 철거(신규)	-분전반(700*900*200) 교체 1면	체육시설동 노후분전반 교체
PVC박스 설치 (신규)	-PVC박스(300*300*150) 설치 5개	수문유입밸브실 배수펌프 설치 약품투입동 에어컨 설치 체육시설동 에어컨 설치
배선용 및 누전차단기 설치 (신규)	-배선용차단기(50AF,4P) 2개 -누전차단기(50AF,4P) 2개 -누전차단기(100AF,4P) 1개	약품투입동 에어컨 설치 체육시설동 에어컨 설치
제경비	-산업안전보건관리비 정산 -보험(건강,연금,노인장기) 정산 -고용개선지원비(주휴수당) 정산	미가입 및 불충족에 따른 정산

Ⅲ				설계변경 심의결과

□ 물량증감 및 신규공정의 적정성 여부 : 적정

Ⅳ				조 치 의 견

□ 심의결과 반영하여 설계변경 계약후 1차계약분 준공처리 하고자 함.

붙임 1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차 및 1차) 1부. 끝