문서번호	시설보수과-10725
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김재윤		임형규	12/07
			이경우
협 조

「목동교동측IC 외 1개소 보수공사」

설계변경(정산) 검토 보고

2023. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

「목동교동측IC 외 1개소 보수공사」

설계변경(정산) 검토 보고

「목동교동측IC 외 1개소 보수공사」와 관련, 감독위탁 기관으로부터 "설계변경(정산)" 도서가 접수되어 검토 후 준공처리코자 함

□ 관련문서

ㅇ 설계변경(정산) 보고서 제출 [서울시설공단 공사감독1처-6210, ‘23.12.7.]

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 목동교동측IC 외 1개소 보수공사

ㅇ 공사내용 : 표면보수 946㎡, 단면보수 166㎡, 신축이음보수 108m 등

ㅇ 공사기간 : 2023. 5. 25.~12.13.

ㅇ 공 사 비 : 537백만원(도급비 340, 관급비 194, 이전비 3)

ㅇ 도 급 사 : (주)지승유지스 대표 신학용

□ 보고내용 (서울시설공단)

ㅇ ***************************************

- 서울교 배수시설 설치 : 4개소 36m (증)

ㅇ ***************************************

ㅇ 기타 제경비 등 정산 반영(건강,연금 및 퇴직공제부금 등 실정산 반영)

ㅇ 사업물량 증/감 현황

공 종	단위	당 초	변 경	증/감		비 고
****	*	***	*****	**	***
***********	*	***	***	**	*
*******	*	**	**	**	**
******	**	*	*	**	*	******
*********	*	***	***		*

※ 기 설정보고 : 현장 실정보고에 따른 검토결과 보고(시설보수과-9303, '23.10.27.)

ㅇ 공사비 증/감 현황                                   (단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증/감		비 고
총공사비	*******	*******	**	***
도급비	*******	*******	**	******
관급비	*******	*******	**	******
이전비	*****	*****	**	*****	폐기물, 건설재해예방지도

□ 검토내용 및 조치의견

ㅇ 감독기관(서울시설공단) 으로부터 제출된「설계변경(정산) 보고사항」에 대하여 검토한 결과, 실정보고 등 관련근거에 따라 적정 반영되었다고 판단되기에 상기내용과 같이 설계변경 시행코자 함

□ 향후계획

ㅇ 2023. 12.   : 변경계약 및 공사 준공

붙  임 : 설계변경(정산) 관련 도서 1식(서울시설공단).  끝.