실정보고 검토서

(대모지하차도 광역상수도 기존관 철거 및 폐쇄 충진 수량 변경)

공 사 명

양재대로 구조개선 사업

공사개요

·위      치 : 구룡터널사거리~삼성의료원교차로

·사업기간 : '18.07. ~ '24.12.

·도 급 비 : 1,940억원

·시공사 : 롯데건설(주) 외1

·감리단 : (주)동명기술공단

실정보고 건명

대모지하차도 광역상수도 기존관 철거 및 폐쇄 충진 건 변경

[동기강 2023-280호(2023.12.05)]

실정보고 사유

유관기관(한국수자원공사) 협의사항 반영(시점부 곡간 각도 조정 : 45°→22.5°) 및 현장여건을 고려한 광역상수관 기존관 철거 및 폐쇄·충진 수량 변경

건설사업관리단

검토의견

대모지하차도 광역상수도 이설공사 중 협의사항 반영 및 현장 여건을 고려한 기존관 철거 및 폐쇄·충진 시공에 대한 수량 변경은 타당하다고 판단됨

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

구분		당초	변경	비고(증·감)
***	*********	****	****	*****
	******	****	****	*****
***		********	*********	**********

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ㅇ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

해당없음

발주처

검토의견

상기 내용과 같이 유관기관 협의사항 및 현장여건을 반영한 광역상수도 기존관 철거 및 폐쇄·충진 시공에 대한 수량변경은 타당하다고 판단되며 설계변경에 반영하고자 함

비 고

결재

주무관

이나영

토목설계과장

박운용

토목부장

12/07

代최진우

협조

주무관

노승환