문서번호	도로보수과-12743
결재일자	2023. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
박정길	박해웅	신준식	12/07
			代권순구
협 조

낙찰차액 및 집행잔액 사용 계획 보고

[2023년 포장도로 맨홀 평탄성 개선공사]

2023. 12.

동부도로사업소

(도로보수과)

낙찰차액 사용 계획 보고

[2023년 포장도로 맨홀 평탄성 개선공사]

우리 사업소에서 시행중인 『2023년 포장도로 맨홀 평탄성 개선공사(연간단가)』 관련, 시공수량 증·감 등에 따른 낙찰차액 및 집행잔액 사용계획을 검토하여 보고 드림

Ⅰ		관련근거

○ 맨홀 평탄성 개선공사 관련 예산집행 철저(도로관리과-6801호, 2023.10.25.)

- 2023년 하반기 지방재정 집행 적극 활용 지침(행정안전부 회계제도과-6883호,2023.8.23.)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 2023년 포장도로 맨홀 평탄성 개선공사(연간단가)

○ 공사기간 : ************************

○ 규    모 : *************

○ 도 급 비 : *****************************

○ 도 급 자 : ****************

Ⅲ		보고내용

□ 낙찰차액 사용 사유

○ 민원, 순찰에 따른 정비물량 증가

○ 노후포장도로 정비면적 증가에 따른 맨홀정비물량 증가

○ 유관기관에서 맨홀정비요청물량 증가 등 반영

○ 주요 수량 증감내역

(단위:개소)

구분	주/야	당초	변경	증, 감	비고
********	**	**	*	*****
	**	**	**	*****
********	**	**	***	*****
	**	***	**	*****
********	**	**	*	*****
	**	**	**	*****
********	**	*	*	*****
	**	**	**	*****
************	**	*	*	*****
	**	*	*	*****
*************	**	*	*	*****
	**	**	*	*****
********	**	*	*	*****
	**	**	**	*****
***	**	***	***	*****
	**	***	***	*****

□ 낙찰차액 사용계획

○ 예산별 사용 계획

(단위: 원)

예산과목	예산액	계약액 (도급액)	낙찰차액	부족예산	비고
*************	*************	***********	***********	**********	**** *****

○ 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		조치계획

○ 상기와 같이 낙찰차액을 활용 불량맨홀을 추가 정비하여 안전사고를 예방하고 쾌적한 도로환경을 조성코자하며, 계약업체에 작업지시 우선 정비하고 예산범위내 설계변경 및 정산코자 함.

붙임  1. 맨홀 평탄성 개선공사 관련 예산집행 철저 1부.

2. 설계변경 예상내역서[2023년 맨홀 평탄성 개선공사] 1부.  끝.